2021년 하반기 군정 주요업무 평가결과

( 한방항노화과 )

□ 총    평

❍ 2023년 산청세계전통의약엑스포 국제행사 승인 및 재단법인 엑스포 조직위원회 설립 및 지원 조례 제정 등 차질없는 준비로 한방항노화 산업 육성과 관광사업의 연계 강화

❍ 동의보감촌 및 산청한방자연휴양림 확장 완료하였으며, 이행 후 계속사업으로 사업부지 및 엑스포 이전 주차장 조성으로 행사 준비에 만전을 기함

❍ 코로나19 상황 속에서 제21회 온라인 산청한방약초축제를 성공적으로 개최하여 유통 마케팅을 통한 농가소득 증대에 기여

□ 추진상황

구 분	추진실적(건)						비 고
	계	완료	이행후 계속추진	정상 추진	장기 추진	기타
계	4		1	3
군수공약사업	2		1	1
주요시책사업	2			2

□ 주요성과(공모사업 등)

❍ 2023 산청세계전통의약항노화엑스포 국제행사 승인

- 예산 / 기간 : 123.4억원 / 2023.9.15 ~ 2023.10.19.(35일간)

❍ 한방약초산업특구, 경남유일 우수 지역특구로 선정

- 중소벤처기업부 선정 195개 특구 중 9곳 선정

❍ 공립 박물관․미술관 실감콘텐츠 제작 및 체험존 조성지원사업 공모

선정(1,200백만원)

❍ 유네스코 세계기록유산 『동의보감』 활용 홍보사업 공모 선정(749백만원)

❍ 시군구 지역연고산업 육성사업 공모 선정(비R&D사업 지원 550백만원)

❍ 약용작물산업화지원센터 건립 공모사업 선정(60억원)

❍ 산청한방약초축제 “문화체육관광부 선정 대한민국 문화 관광축제”

지정 연장 (2019년~2022년)

❍ 거함산 항노화 테마파크 무릉교 가설공사 설치 완료

❍ 동의보감촌 동의보감문 건립 완료

□ 향후 추진계획

❍ 사업별 추진 일정에 차질 없도록 세부 계획을 수립하여 추진 철처

구 분	공약사업
담당부서	한방항노호과(관리운영담당)
추진진도(%)	60%

48

2023 산청세계전통의약항노화엑스포 개최

준비

○ 2023엑스포 개최를 통한 국민건강 향상 및 국가경쟁력 제고와 산청군의 항노화산업 육성 및 힐링관광지 조성에 기여하고, 「2013산청세계전통의약엑스포」의 성공적 개최 성과 계승

□ 사업개요

❍ 위    치 : 2023. 9. 15. ~ 2023. 10. 19.(35일간)

❍ 사 업 비 : 동의보감촌 및 한방의료클러스터 일원

❍ 사 업 량 : 123.4억원(국비 37, 도비 25, 군비 25, 수익/기타 36.4)

❍ 사업내용 : 3개 부문(전시,이벤트,컨벤션) 10개 유형 65개 프로그램 운영

□ 추진사항

❍ 2019. 12월~2020. 7월 : 기본계획 및 타당성조사 용역

❍ 2020.  9월           : 국제행사 개최계획서 제출(산청군→경남도)

❍ 2020. 12월          : 국제행사 개최계획서 제출(경남도‧산청군→보건복지부)

❍ 2020. 12월           : 보건복지부 검토의견서 등 제출(보건복지부→기획재정부)

❍ 2021.  2월           : 국제행사 심사대상 선정(기획재정부)

❍ 2021.  4월~7월       : 국제행사 타당성 조사 용역(대외경제정책연구원):

❍ 2021.  8월           : 국제행사심사위원회 심사 및 국제행사 승인

❍ 2021.  9월           : 재단법인 엑스포 조직위원회 설립 및 지원 조례 제정

❍ 2021. 11월           : 재단법인 엑스포 조직위원회 출자□출연안 의결

□ 문제점 및 대책

❍ 성공적인 2023엑스포 개최를 위한 행사 준비 만전

□ 향후 추진계획

❍ 2021. 12월	: 재단법인 엑스포 조직위원회 설립 등기

❍ 2022.  1월	: 엑스포 조직위 출범 및 행사준비

❍ 2023.  9월	: 엑스포 개최(재단법인 엑스포 조직위)

구 분	공약사업
담당부서	한방항노화과 (시설사업·휴양림담당)
추진진도(%)	100%(이행후 계속추진)

49

동의보감촌 및 산청한방자연휴양림 확장

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2018. 10월 ~ 2026. 12월

❍ 위    치 : 산청군 금서면 특리 동의보감촌 일원

❍ 사 업 비 : 17,000백만원(군비 17,000) 정도

❍ 사업내용

- 동의보감촌 확장 부지조성을 위한 지구단위계획구역 지정

- 휴양림 내 산책로, 탐방로, 야외쉼터, 약용작물, 특화단지 조성을 위한 휴양림 확대 지정

□ 추진사항

❍ 2019. 7월 ~ 2020. 6월 : 관광지 조성 계획 변경 및 승인(연장) 협의

❍ 2019. 8월            : 한방자연휴양림 지적구역 변경 진행(산림청)

❍ 2019. 9월 ~ 2021. 6월 : 특리지구 개발사업 토지매입(38필지 중 34필지 보상완료)

❍ 2020. 4월            : 휴양림 조성계획 진행(경상남도 승인)

❍ 2020. 4월            : 한방자연휴양림 지정구역 변경 승인(산림청)

❍ 2020. 7월            : 특리지구 군관리계획결정 산청군계획위원회 자문

❍ 2021. 1월            : 특리지구 지구단위계획 결정 입안

❍ 2021. 1월 ~ 2021. 5월 : 특리지구 주민의견청취 및 관계부서협의

❍ 2021. 6월            : 산청군관리계획(특리지구단위계획) 결정 고시

□ 연차별 사업예산

(단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2020년 )	‘21년	‘22년	‘23년 이후	비 고
계	17,000	5,209	3,400	6,000	2,391
국비
도비
군비	17,000	5,209	3,400	6,000	2,391
기타

□ 향후 추진계획

❍ 사업부지 조성 및 2023년 엑스포 이전 주차장 조성

구 분	시책사업
담당부서	한방항노화과(휴양림담당)
추진진도(%)	10%

50

동의보감촌 왕산 케이블카 설치

○ 우리군 대표 관광지 동의보감촌 케이블카 설치로 새로운 관광 수요에 부응

○ 체험·체류형 관광지 조성으로 지역 경제 및 동의보감촌 활성화

□ 사업개요

❍ 위    치 : 동의보감촌 ~ 왕산

❍ 사 업 비 : 삭도 L=1.8km(편도)

❍ 사 업 량 : 35,000백만원 정도

❍ 사업내용 - 상ㆍ중간ㆍ하부 정류장 각 1개소

- 케이블(로프) 시설 : L=1.87Km, 곤돌라(캐빈) : 10인승 40대

□ 추진사항

❍ 2018.  1월 ~ 2019. 5월 : 타당성검토 용역 완료

❍ 2019. 11월	: 재정투사심사(자체심사) 승인

❍ 2020.  5월	: 공유재산관리계획안 지방의회 승인

❍ 2020.  5월	: 동의보감촌 케이블카 설치를 위한 주민설명회

❍ 2020. 10월	: 군관리계획 결정(궤도)

❍ 2020. 11월	: 재정투자심사(중앙) 조건부 승인(실시계획인가 전 재심사)

❍ 2021.  3월 ~2022. 2월 : 환경영향평가법에 따른 평가 실시

❍ 2021. 7월	: 기본설계 완료 및 실시설계 착수

❍ 2021. 9월	: 자재선정위원회 자재선정(도펠마이어)

□ 문제점 및 대책

❍ 삭도 및 정류장 설치 소요예산 확보 어려움

⇒ 중앙부처 및 경남도 재정지원 요청

❍ 환경영향평가 전환(소규모→일반)으로 협의내용 반영을 위한 실시설계 기간 연장

⇒ 식생조사 완료. 초안작성 준비 중으로 협의기간 최대한 단축 노력

□ 향후 추진계획

❍ 2022. 3월              : 환경영향평가 협의 완료

❍ 2022. 7월              : 실시설계 완료

❍ 2022. 8월             : 실시계획 및 행정절차 추진(기술심의, 궤도사업허가 등)

❍ 2023. 1월 ~ 2024. 12월 : 착공 및 준공

구 분	시책사업
담당부서	한방항노화과(한방진흥담당)
추진진도(%)	30%

51

한방웰니스지원센터 조성공사

○ 산청군 문화․관광․한방약초산업의 상생 발전을 위한 통합 플랫폼 구축

및 한방웰니스관광(체험)을 위한 활동 거점 조성

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 금서면 특리 1300-46 일원

❍ 사 업 비 : 금2,400백만원(국비 1,680 도비 216 군비 504)

❍ 사 업 량 : 건물 증축 1식(건축면적 341.8㎡, 연면적 623.8㎡)

❍ 사업내용 : 한방웰니스지원센터 증축 1식(3층)

□ 추진사항

❍ 2021.  7월 : 한방웰니스지원센터 조성공사 실시설계 완료

❍ 2021.  9월 : 한방웰니스지원센터 조성공사 1차분 계약 및 착공

❍ 2021. 12월 : 한방웰니스지원센터 조성공사 1차분 기성검사(공정률 73%)

□ 문제점 및 대책

❍ 현재 철근콘크리트 공사를 기초․1층․2층까지 완료하였으나, 동절기로

인해 3층 철근콘크리트 공사 추진 애로

❍ 동절기공사 시행지침에 따라 3층 철근콘크리트 타설 진행 예정

□ 향후 추진계획

❍ 2022. 1월 : 한방웰니스지원센터 조성공사 2차분 발주

❍ 2022. 3월 : 한방웰니스지원센터 지붕공사 착공

❍ 2022. 6월 : 한방웰니스지원센터 준공 예정