2021년 하반기 군정 주요업무 평가결과

(문화체육과)

□ 총    평

❍ 지역 특색에 맞는 문화예술 공연으로 지역주민과 방문객에게 문화        향유 기회를 제공하고, 개인과 단체에 대한 문화예술 활동지원, 문화       기반시설 확충을 통한 문화 복지 향상 및 다양한 평생 교육 기회 제공       으로 품격높은 문화 도시 형성에 이바지 함.

❍ 노후되고 훼손된 문화재 보수 및 주변정비로 체계적인 문화재 보존 관리,       산청문화재의 우수성과 예술성을 높이는데 기여함

❍ 공공체육시설 확충 및 유지보수를 통해 군민에게 쾌적하고 다양한        체육 시설을 제공, 건강증진 및 삶의 질 향상에 이바지 함.

□ 추진상황

구 분	추진실적(건)						비 고
	계	완료	이행후 계속추진	정상 추진	장기 추진	기타
계	9	4		5
군수공약사업	4	4
주요시책사업	5			5

□ 주요성과(공모사업 등)

❍ 지역문화 활성화를 위한 문화예술행사 추진(문화예술담당)

- 2021 상설문화관광프로그램 운영, 방방곡곡문화공감 공연, 상주단체 공연 등

❍ 문화기반시설 유지 보수 및 확충 사업 추진(문화예술담당)

- 한국선비문화연구원 옥상교육장 건립, 산청문화예술회관 시설 유지보수 등

❍ 체계적인 전통문화유산 계승 및 전승사업 추진(문화재담당)

- 산청·단성향교 제례 및 전통문화계승사업, 서원 제례 지원 등

❍ 체계적인 문화재 보수정비사업 추진(문화재담당)

- 국가지정문화재 보수사업, 도지정문화재 보수정비사업 등

❍ 생활 체육활성화를 통한 건강 산청 이미지 제고(체육행정담당)

❍ 학교연계형(한종목) 공공스포츠클럽 사업으로 다양한 연령·계층의 지역       주민이 안정적으로 즐길 수 있는 선진형 공공생활체육 제공(체육행정담당)

❍ 체육시설 확충 및 유지관리를 통한 군민의 건강하고 활기찬 생활 원동력       조성(체육시설담당)

□ 향후 추진계획

❍ 산청지리산도서관의 안정적이고 영구한 운영을 통한 산청군민의 문화       복지 향상을 위해 경상남도교육청 소유의 폐교와 교환 추진

❍ 단성 유림회관(몽학관) 건립사업은 2021. 11월 설계완료, 12월 착공하여,       2022년 6월 준공 및 개관 예정

❍ 산청 유림회관 건립사업 2021. 12월 실시설계 용역 착수하였으며,        2022년 3월 설계 용역 완료, 2022년 4월 공사 착공하여, 10월 준공       및 개관 예정

❍ 남부체육공원 축구장 정비공사는 2022년 1월 ~ 4월 실시설계, 2022년       8월 공사 준공 예정

❍ 오성게이트볼장 개보수사업은 2022년 2월 ~ 4월 실시설계 후 2022년 8월       공사 준공 예정

❍ 단성파크골프장 조성사업은 2022년 2월 ~ 4월 실시설계 후 2022. 8월       공사 준공 예정

구 분	공약사업
담당부서	문화체육과(체육시설담당)
추진진도(%)	100%(완료)

52

경호강 관광화 사업(래프팅시설, 체육시설) 시행 업명

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 산청 공설게이트볼장 건립사업

❍ 사업기간 : 2020. 11월 ~ 2021. 04월

❍ 위    치 : 금서면 매촌리 1번지 공설게이트볼장 일원

❍ 소요예산 : 1,950백만원(군비1,950백만원)

❍ 사업내용 : 공설게이트볼장 건립공사 1식 A=1,262㎡

□ 추진사항

❍ 2020. 11월 : 공설게이트볼장 건립공사 착공

❍ 2021. 04월 : 공설게이트볼장 건립공사 준공

□ 연차별 사업예산

(단위:백만원)

구분	총사업비	‘18년	‘19년	‘20년	‘21년	‘22년	‘23년 이후
계	1,950			1,180	770
국비	0
도비
군비	1,950			1,180	770
기타

□ 향후 추진계획

❍ 해당없음

❍ 향후 래프팅업체와 원만히 협의 시 예산 확보 후 재추진할 예정임.

구 분	공약사업
담당부서	문화체육과(체육시설담당)
추진진도(%)	100%(완료)

53

남부 문화체육센터(수영장+작은영화관) 건립

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 신안면 하정리 930-1번지 일원

❍ 사 업 비 : 8,500백만원(국비 2,260, 도비 1,710, 군비 4,530)

❍ 사 업 량 : 남부 문화체육센터 건립 1식

❍ 사업내용 : 실내수영장(25m 4레인), 작은영화관 2관(99석), 체력단련실 등

□ 추진사항

❍ 2015. 12월 : 기본계획 및 타당성 조사용역

❍ 2016.  5월 : 경상남도 지방재정투자심사(3회-66억)

❍ 2017.  9월 : 남부 문화체육센터 건립사업 실시설계 용역

❍ 2018. 12월 ~ 2020. 5월 : 공사 착공 및 준공

□ 연차별 사업예산

(단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2020년 )	‘21년	‘22년	‘23년 이후	비고
계	8,500	8,500
국비	2,260	2,260
도비	1,710	1,710
군비	4,530	4,530
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 해당없음

구 분	공약사업
담당부서	문화체육과(문화예술담당)
추진진도(%)	100%(완료)

54

산청지리산도서관 건립 사업

□ 사업개요

❍ 위    치 : 2019. 1월 ~ 2020. 11월

❍ 사 업 비 : 3,850백만원

❍ 사 업 량 : 도서관 건립 1식

❍ 사업내용 : 공공도서관 1동 건립(지상 2층, 연면적 1,197㎡)

※ 자료실(종합/어린이․유아), 북카페, 문화교육공간(열람실, 강좌실)

□ 추진사항

❍ 2016.  3월 : 경남도교육감 산청군 방문시 남부지역 도서관 건립 주민 건의

❍ 2019.  1월 : 산청군청 ↔ 경상남도교육청 도서관 건립운영 협약 체결

❍ 2019.  4월 : 기본 및 실시설계용역 착수

❍ 2019. 12월 : 계약심사 및 공사발주

❍ 2020.  2월 : 계약 및 공사 착수

❍ 2020.  9월 : 준공

❍ 2020. 11월 : 산청지리산도서관 개관

□ 연차별 사업예산

(단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2020년 )	‘21년	‘22년	‘23년 이후	비고
계	3,850	3,850
국비	1,600	1,600
도비	0	0
군비	2,250	2,250
기타	0	0

□ 향후 추진계획

❍ 산청지리산도서관의 안정적이고 영구한 운영으로 산청군민의 문화복지       향상을 위해 행정재산인 산청군 소유의 산청지리산도서관과 경상남도       교육청 소유의 폐교를 교환

구 분	공약사업
담당부서	문화체육과(문화재담당)
추진진도(%)	100%(완료)

55

도천서원 정비사업

□ 사업개요

❍ 위    치 : 2018 ~ 2020

❍ 사 업 비 : 226백만원(도비 125.5, 군비 100.5)

❍ 사 업 량 : 도천서원 정비사업 1식

❍ 사업내용 : 기록화사업, 종합정비 기본계획 수립, 방충제 도포, 홍살문보수,

도천서원 및 삼우사 보수

□ 추진사항

❍ 2018. 7월 : 산청 도천서원 신안사재 기록화 사업 완료

❍ 2018. 7월 : 산청 도천서원 신안사재 종합정비 기본계획 수립 용역 완료

❍ 2019. 5월 : 방충사업 완료

❍ 2019. 9월 : 홍살문 보수 완료

❍ 2020. 9월 : 도천서원 및 삼우사 보수 완료

□ 연차별 사업예산

(단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2020년 )	‘21년	‘22년	‘23년 이후	비고
계	226	226
국비
도비	125.5	125.5
군비	100.5	100.5
기타

□ 향후 추진계획

❍ 문화재 및 주변시설물 훼손 발생 시 긴급보수

구 분	시책사업
담당부서	문화체육과(문화예술담당)
추진진도(%)	10%(정상추진)

56

단성 유림회관(몽학관) 건립

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 단성면 성내리 146번지 일원

❍ 사 업 비 : 2,000백만원(도비 1,000, 군비 1,000)

❍ 사 업 량 : 유림회관 건립 1식

❍ 사업내용 : 단성 유림회관 건립

□ 추진사항

❍ 2021.  4월 : 단성 유림회관 건립 변경 계획 수립

❍ 2021.  5월 : 공유재산관리계획 변경 심의

❍ 2021. 11월 : 단성 유림회관 건립공사 기본 및 실시설계 용역 완료

❍ 2021. 12월 : 단성 유림회관 건립공사 착공

□ 연차별 사업예산

(단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2021년 )	‘22년	‘23년 이후	비고
계	2,000	1,100	900
국비
도비	1,000	1,000
군비	1,000	100	900
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 2022.  6월 : 단성 유림회관 건립공사 준공 및 개관

구 분	시책사업
담당부서	문화체육과(문화예술담당)
추진진도(%)	5%(정상추진)

57

산청 유림회관 건립

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 산청읍 지리 369-3번지 일원

❍ 사 업 비 : 1,580백만원(군비 1,580)

❍ 사 업 량 : 산청 유림회관 건립 1식

❍ 사업내용 : 산청 유림회관 건립

□ 추진사항

❍ 2021. 11월 : 공유재산 관리계획 승인

❍ 2021. 12월 : 산청 유림회관 건립공사 기본 및 실시설계 용역 착수

□ 연차별 사업예산

(단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2021년 )	‘22년	‘23년 이후	비고
계	1,580	80	1,500
국비
도비
군비	1,580	80	1,500
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 2022.  3월 : 기본 및 실시설계 용역 완료

❍ 2022.  4월 : 산청 유림회관 건립공사 착공

❍ 2022. 10월 : 산청 유림회관 건립공사 준공 및 개관

구 분	시책사업
담당부서	문화체육과(체육시설담당)
추진진도(%)	0%(정상추진)

58

남부체육공원 축구장 정비공사

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 신안면 하정리 567번지 일원

❍ 사 업 비 : 900백만원(균특 360, 군비 540)

❍ 사 업 량 : A=8,360㎡

❍ 사업내용 : 축구장 인조잔디 교체 및 탄성패드 설치 1식

□ 추진계획

❍ 2022. 1월 ~ 4월 : 남부체육공원 내 축구장 정비공사 실시설계

❍ 2022.  5월 : 행정절차 이행

❍ 2022.  6월 : 공사 착공

❍ 2022.  8월 : 공사 준공

□ 연차별 사업예산

(단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2021년 )	‘22년	‘23년 이후	비고
계			900
국비			360
도비
군비			540
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 해당없음

구 분	시책사업
담당부서	문화체육과(체육시설담당)
추진진도(%)	0%(정상추진)

59

오성게이트볼장 개보수사업

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 오부면 내곡리 458-1번지 일원

❍ 사 업 비 : 200백만원(균특 80 , 군비 120)

❍ 사 업 량 : A=482.09㎡

❍ 사업내용 : 게이트볼장 인조잔디 포설 및 전기시설 등 개보수 1식

□ 추진계획

❍ 2022. 2월 ~ 4월 : 오성게이트볼장 개보수사업 실시설계

❍ 2022.  5월 : 행정절차 이행

❍ 2022.  6월 : 공사 착공

❍ 2022.  8월 : 공사 준공

□ 연차별 사업예산

(단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2021년 )	‘22년	‘23년 이후	비고
계			200
국비			80
도비
군비			120
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 해당없음

구 분	시책사업
담당부서	문화체육과(체육시설담당)
추진진도(%)	0%(정상추진)

60

단성파크골프장 조성사업

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 단성면 묵곡리 930

❍ 사 업 비 : 300백만원(국비 , 군비 300)

❍ 사 업 량 : A=12,000㎡

❍ 사업내용 : 파크골프장 조성 1식

□ 추진계획

❍ 2022.  2월 ~ 4월 : 파크골프장 조성 실시설계

❍ 2022.  5월 : 행정절차 이행

❍ 2022.  6월 : 공사 착공

❍ 2022.  8월 : 공사 준공

□ 연차별 사업예산

(단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2021년 )	‘22년	‘23년 이후	비고
계			300
국비
도비
군비			300
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 해당없음