2021년 하반기 군정 주요업무 평가결과

(복지지원과)

□ 총    평

❍ 어르신, 장애인 보조보행기, 전동휠체어 지원 사업은 차질 없이 추진하였고,

❍ 산청복지타운 신축과 연계 장난감백화점은 12월 준공하여 22년 3월 개관 예정으로 원활히 추진되고 있으며,

❍ 산엔청복지관 분관신축은 12월 착공하고 산청군 장애인회관 신축 공사는 ‘21. 10월 조달청 설계공모의뢰 중으로 전반적으로 완료 또는 정상추진 되고 있음

□ 추진상황

구 분	추진실적(건)						비 고
	계	완료	이행후 계속추진	정상 추진	장기 추진	기타
계	5	2	1	2
군수공약사업	3	2	1
주요시책사업	2			2

□ 주요성과(공모사업 등)

❍ 보행에 어려움이 있는 거동불편 노인 및 장애인에게 활동보행기 및 전동휠체어를 지원함으로써 사회생활 및 보행불편을 해소함

❍ 산엔청복지관 분관 신축사업은 2021. 12월 건축·전기공사 발주하여 현재 정상추진 중이며 준공 시 남부지역의 노인·장애인의 복지서비스 접근성 향상 및 서비스 확대로 산청군 복지의 질 향상에 크게 기여할 것으로 예상됨

❍ 산청복지타운과 장난감백화점은 2021. 12월 준공하였으며, 가족 중심의 복지‧문화 복합적 서비스 제공을 통한 군민 복지 향상에 기여할 예정임

□ 향후 추진계획

❍ 산엔청 복지관 분관 준공 및 개관 : 2023. 1월

❍ 산청군 장애인 회관 준공 및 개관 : 2023. 9월

구 분	공약사업/시책사업
담당부서	복지지원과(노인복지담당)
추진진도(%)	100%

1

어르신, 장애인 보조보행기, 전동휠체어 지원

각종 노인성 질환 등으로 거동에 어려움을 겪고 있는 노인들에게 활동보조기를 지원함으로써 거동불편 해소 및 사회활동 참여에 기여

□ 사업개요

❍ 지원대상 : 관내 거주하는 만65세 이상 노인 중 노인성 질환으로 보행에 어려움이 있는 저소득 노인 및 지체장애 등으로 이동 불편한 관내 거주 장애인

❍ 지원품목 : 보조보행기, 전동휠체어

❍ 사 업 량 : 220대

❍ 사 업 비 : 134백만원(국 12, 도 28, 군 94 )

❍ 사업내용 : 보조보행기, 전동휠체어 구입 지원

□ 추진사항

❍ 2018. 10월 : 활동보행기 및 전동휠체어 지원계획 수립

❍ 2018. 11월 : 산청군 노인 성인용 보행기 지원에 관한 조례 제정

❍ 2019. 7월 : 활동보행기(227대), 전동휠체어(26대) 보급

❍ 2020. 7월 : 활동보행기(224대), 전동휠체어(20대) 보급

❍ 2021. 4월 : 활동보행기(200대), 전동휠체어(17대) 보급

□ 문제점 및 대책

❍ 해당사항 없음

□ 향후 추진계획

❍ 2022년까지 활동보행기 200대 및 전동휠체어 20대 보급

구 분	공약사업
담당부서	복지지원과(여성가족담당)
추진진도(%)	100%(완료)

2

산청복지타운 신축

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2019 ~ 2021년

❍ 위    치 : 산청군 산청읍 옥산리 725번지 일원

❍ 소요예산 : 5,100백만원(국 2,400 도 750 군 1,950)

❍ 사업내용 : 산청복지타운 건립 1동(2층 규모, 연면적 2,237㎡)

가족센터, 공동육아나눔터, 장난감백화점, 생활문화센터

□ 추진사항

❍ 2018.  4월 : 기본계획 수립 및 지방재정투자심사 승인

❍ 2018. 11월 : 공유재산관리계획 승인

❍ 2019. 10월 : 2020년 생활SOC 복합화사업 선정, 사업비 확보(국도비 3,150백만원)

❍ 2020. 10월 : 기본 및 실시설계 완료, 공사발주

❍ 2020. 11월 ~ 2021. 12월 : 착공 및 준공

□ 연차별 사업예산

(단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2020년 )	‘21년	‘22년	‘23년 이후	비고
계	5,100	2,550	2,550
국비	2,400	1,200	1,200
도비	750	525	225
군비	1,950	825	1,125
기타

□ 향후 추진계획

❍ 2022.  1 ~ 2월 : 위‧수탁 계약, 추가 인력채용 및 비품 구입

❍ 2022.  3월 : 개관

구 분	공약사업
담당부서	복지지원과(여성가족담당)
추진진도(%)	100%(완료)

3

장난감 백화점 운영

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2019 ~ 2021년

❍ 위    치 : 산청군 산청읍 옥산리 725번지 산청복지타운 내

❍ 소요예산 : 200백만원

❍ 사업내용 : 장난감백화점 설치 및 운영(1개소 165.3㎡)

□ 추진사항

❍ 2018 ~ 2021. 11월 : 산청복지타운 신축과 연계 추진

❍ 2021.  8월 : 2021년 맘쓰허그 장난감도서관 설치 지원사업 선정(200백만원)

❍ 2021. 11월 : 인테리어 설계 완료, 공사발주

❍ 2021. 12월 : 착공 및 준공

□ 연차별 사업예산

(단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2020년 )	‘21년	‘22년	‘23년 이후	비고
계	250		200	50
국비
도비
군비	50			50
기타	200		200

□ 향후 추진계획

❍ 2022.  1 ~ 2월 : 위‧수탁 계약, 인력채용 및 비품 구입

❍ 2022.  3월 : 개관

구 분	시책사업
담당부서	복지지원과(장애인복지담당)
추진진도(%)	21%(정상추진)

4

산엔청복지관 분관 신축

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 단성면 성내리 198번지외 2필지

❍ 사 업 비 : 5,960백만원(국1,900, 도500, 군3,560)

❍ 사 업 량 : 건물 1동 신축(3층, 연면적1,942.62㎡)

❍ 사업내용 : 산엔청복지관 분관 신축

□ 추진사항

❍ 2018. 11월 : 중기지방재정계획 반영

❍ 2019.  2월 : 지방재정투자사업 심의 완료

❍ 2020.  5월 : 공유재산관리계획 승인

❍ 2020.  7월 : 공공건축 사업계획 사전검토

❍ 2020.  9월 : 산청군 공공건축심의위원회 심의 완료

❍ 2020. 11월 : 일반설계 공모 조달청 의뢰

❍ 2021.  3월 : 기본 및 실시설계 용역 공모 결정

❍ 2021.  4월 : 기본 및 실시설계 용역 계약

❍ 2021. 11월 : 기본 및 실시설계 용역 완수/ 계약심사 완료

❍ 2021. 12월 : 건축·전기공사 발주

□ 연차별 사업예산

(단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2020년 )	‘21년	‘22년	‘23년 이후	비고
계	5,960	600	1,800	3,560
국비	1,900	600	1,300
도비	500		500
군비	3,560			3,560

□ 문제점 및 대책

❍ 공정 간 협업으로 산엔청복지관 분관 신축사업 신속추진 노력

□ 향후 추진계획

❍ 2022.  1월 : 소방·통신 공사 발주

❍ 2022. 12월 : 공사 준공

❍ 2023.  1월 : 개관

구 분	시책사업
담당부서	복지지원과(장애인복지담당)
추진진도(%)	5%(정상추진)

5

산청군 장애인회관 신축

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 금서면 매촌리 산 11-1, 294

❍ 사 업 비 : 5,500백만원(도2,750, 군2,750)

❍ 사 업 량 : 건물 1동 신축(1식 3층규모, 연면적1,940㎡)

❍ 사업내용 : 산청군 장애인회관 신축

□ 추진사항

❍ 2020. 10월 : 산청군 장애인회관 신축 계획 수립

❍ 2020. 11월 : 지방재정투자사업 심의 완료

❍ 2020. 11월 : 공유재산관리계획 반영

❍ 2020. 12월 : 공공건축 사업계획 사전검토

❍ 2021.  7월 : 산청군 공공건축심의위원회 심의완료

❍ 2021. 10월 : 일반설계 공모 조달청 의뢰

□ 연차별 사업예산

(단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2020년 )	‘21년	‘22년	‘23년 이후	비고
계	5,500		320		5,180
국비
도비	2,750		160		2,590
군비	2,750		160		2,590

□ 문제점 및 대책

❍ 경상남도 2단계 균형발전사업 추경예산 확보 필요

❍ 경상남도 3단계 균형발전사업 공모사업 선정을 위한 노력필요

□ 향후 추진계획

❍ 2022.  1월 : 기본 및 실시설계 용역

❍ 2022.  8월 : 계약심사 및 입찰

❍ 2022.  9월 : 건축협의

❍ 2022. 10월 : 공사발주 및 착공

❍ 2023.  9월 : 공사준공 및 개관