새로운 변화, 모두가 행복한 산청

2023년 12월 31일 기준

2023년 하반기 주요업무 추진상황

■ 2023년 하반기 주요업무 추진상황(총 71건 : 공약 57, 시책 14)

- 완료 9(공약4, 시책5), 정산추진 54(공약49, 시책5), 장기추진 8(공약4, 시책4)

구 분	추 진 실 적						비고
	계	완료	이행 후 계속추진	정상추진	장기추진	기타
계	71	7	2	54	8
군 수 공 약 사 업	57	3	1	49	4
주 요 시 책 사 업	14	4	1	5	4

`	산 청 군
	(기획예산담당관)

목    차

Ⅰ		총 괄

❍ 민선8기 공약사업 및 주요 시책사업 추진상황	1

❍ 2023년 하반기 군정 주요업무 평가결과(총괄)	4

Ⅱ		부 서 별

【전략사업담당관 - 3건】

❍ 평가결과	12

ㆍ 지방소멸대응기금 확보 및 대책 사업 추진(공약)	13

ㆍ 인구감소에 대한 대책 마련(청년주거자금 대출이자 지원 등)(시책)	14

ㆍ 항노화일반산업단지 투자 유치 활성화(시책)	15

【복지정책과 - 1건】

❍ 평가결과	20

ㆍ 사회복지사 등의 처우개선비 인상 지원(공약)	21

【행복나눔과 - 6건】

❍ 평가결과	24

ㆍ 산청군 장애인회관 신축(공약)	25

ㆍ 다문화가족 자녀 헤어컷 비용 지원(공약)	26

ㆍ 성폭력 전문상담소 운영(공약)	27

ㆍ 산청형 어르신 통합돌봄 서비스 추진(공약)	28

ㆍ 산엔청 복지관 장애인 기능 강화사업(시책)	29

ㆍ 조손가족 손자녀 특기활동비 지원(시책)	30

【한방항노화과 - 3건】

❍ 평가결과	34

ㆍ 산청형 한방약초 생산기반 및 유통시스템 개선(공약)	35

ㆍ 동의보감촌 지속가능한 운영체계 구축(공약)	37

ㆍ 2023 산청세계전통의약항노화엑스포성공개최 추진(시책)	38

【문화체육과 - 4건】

❍ 평가결과	42

ㆍ 산청군 행복문화센터 건립(공약)	44

ㆍ 한국선비문화연구원 활성화 지원(공약)	45

ㆍ 공공체육시설 확충(공약)	46

ㆍ 래프팅과 연계한 레저 레포츠장 설립(시책)	48

【관광진흥과 - 6건】

❍ 평가결과	52

ㆍ 대원사 계곡길 연장(공약)	54

ㆍ 밤머리재 터널과 연계한 관광벨트 구축(공약)	55

ㆍ 중산관광지 활성화 사업(공약)	56

ㆍ 황매산 관광객 편의안전시설 조성사업(공약)	57

ㆍ 남사예담촌 홍보 지원 및 관광 활성화(공약)	58

ㆍ 생초국제조각공원 꽃잔디 확대 조성(공약)	60

【산림녹지과 - 4건】

❍ 평가결과	64

ㆍ 군유림 밀원 식물단지 조성(공약)	65

ㆍ 백두대간 생태축 복원사업(공약)	66

ㆍ 산림 신품종 재배단지 조성(공약)	67

ㆍ 둔철 산림생태인프라 구축사업(공약)	68

【환경위생과 - 1건】

❍ 평가결과	72

ㆍ 생초 민물 먹거리타운 명품화 사업 지원(공약)	73

【지역발전과 - 6건】

❍ 평가결과	76

ㆍ 도시재생 뉴딜사업(옥산지구)(공약)	77

ㆍ 대형아파트 유치(공약)	78

ㆍ 농산어촌 주거플랫폼 사업(공약)	79

ㆍ 농촌공간(모례지역 돈사철거) 정비사업(공약)	80

ㆍ 어린이 놀이마당 조성(공약)	81

ㆍ 매촌지구 택지개발로 대형아파트 유치(시책)	82

【경제교통과 - 7건】

❍ 평가결과	86

ㆍ 읍면 소재지권 주차난 해소(주차장 확보)(공약)	87

ㆍ 사회적기업, 마을기업 창업지원(공약)	88

ㆍ 전통시장 활성화 및 경제 플랫폼 구축(공약)	89

ㆍ 브라보 한방택시 운영 확대와 개선(공약)	90

ㆍ 지역특화 마을기업 신활력 일자리 육성(공약)	91

ㆍ 단계시장 활성화 방안 마련(공약)	92

ㆍ 산청시장 주상복합 신축(공약)	93

【안전총괄과 - 3건】

❍ 평가결과	96

ㆍ 무선 공공 인터넷망 구축사업(공약)	97

ㆍ 방범 cctv 설치 사업(공약)	98

ㆍ 취락마을 방송용 스피커 설치(공약)	99

【건설과 – 2건】

❍ 평가결과	102

ㆍ 원지교차로 개선사업(공약)	103

ㆍ 함양~울산간 고속도로 도로망 구축(시책)	104

【상하수도과 - 2건】

❍ 평가결과	108

ㆍ 상수도 시설 확충(공약)	109

ㆍ 공공하수처리시설 설치사업(공약)	111

【보건정책과 - 2건】

❍ 평가결과	114

ㆍ 내과 전문의 채용 추진(공약)	115

ㆍ 대학병원급 의료기관과의 업무협약 체결(시책)	116

ㆍ 감염병 선제적 방역 시스템 확충(공약)	117

【건강관리과 - 2건】

❍ 평가결과	120

ㆍ 노인 무릎 인공관절 수술비 등 지원 사업(공약)	121

【농축산과 - 10건】

❍ 평가결과	124

ㆍ 농업보조금 확대 지급(공약)	125

ㆍ 청년 농업인, 귀농·귀촌 지원사업 확대(공약)	126

ㆍ 농촌인력 중개센터 운영(공약)	127

ㆍ 친환경 농업 인프라 확충 및 지원(공약)	128

ㆍ 직불금 확대(공약)	129

ㆍ 흑돼지 명품화 사업 지속 확대(공약)	130

ㆍ 유기축산 한우단지 확대(공약)	131

ㆍ 흑돼지 축제 개최(공약)	132

ㆍ 함양산청축협 축분퇴비유통센터 이전(공약)	133

ㆍ 한우 직거래 활성화 지원(시책)	134

【농업진흥과 - 5건】

❍ 평가결과	138

ㆍ 기후변화에 대비한 전략 재배작물 육성(공약)	139

ㆍ 고품질 산청사과 명품화 지원(공약)	140

ㆍ 고소득 작물 스마트 4차산업 지원(공약)	141

ㆍ 스마트팜 청년창업 교육 시설 운영(공약)	142

ㆍ 딸기하우스 물 공급 시설 설치(시책)	143

【농식품유통과 - 4건】

❍ 평가결과	146

ㆍ 산청군 먹거리통합지원센터 건립(공약)	147

ㆍ 도정공장 설치(시책)	148

ㆍ 농업 융복합 6차산업 지원 확대(시책)	149

ㆍ 택배 집하주차장 등 판로 시설 구축(시책)	150

민선8기 공약사업 및 주요 시책사업 추진상황

(2023.12.31.기준)

연번	담 당 부 서	구분	사 업 명	추진상황
				완료	이행 후 계속추진	정상 추진	장기 추진	기타
계			71건(공약 57, 시책 14)
1	전략사업담당관	공약	지방소멸대응기금 확보 및 대책 사업 추진			●
2	전략사업담당관	시책	인구감소에 대한 대책 마련 (청년주거자금 대출이자 지원 등)		●
3	전략사업담당관	시책	항노화일반산업단지 투자 유치 활성화			●
4	복지정책과	공약	사회복지사 등의 처우개선비 인상 지원	●
5	행복나눔과	공약	산청군 장애인회관 신축			●
6	행복나눔과	공약	다문화가족 자녀 헤어컷 비용 지원			●
7	행복나눔과	공약	성폭력 전문상담소 운영			●
8	행복나눔과	공약	산청형 어르신 통합돌봄 서비스 추진			●
9	행복나눔과	시책	산엔청 복지관 장애인 기능 강화사업	●
10	행복나눔과	시책	조손가족 손자녀 특기활동비 지원			●
11	한방항노화과	공약	산청형 한방약초 생산기반 및 유통시스템 개선			●
12	한방항노화과	공약	동의보감촌 지속가능한 운영체계 구축			●
13	한방항노화과	시책	2023 산청세계전통의약항노화엑스포 성공개최 추진	●
14	문화체육과	공약	산청군 행복문화센터 건립			●
15	문화체육과	공약	한국선비문화연구원 활성화 지원			●
16	문화체육과	공약	공공체육시설 확충			●
17	문화체육과	시책	래프팅과 연계한 레저 레포츠장 설립				●
18	관광진흥과	공약	대원사 계곡길 연장			●
19	관광진흥과	공약	밤머리재 터널과 연계한 관광벨트 구축			●
20	관광진흥과	공약	중산관광지 활성화 사업			●
21	관광진흥과	공약	황매산 관광객 편의안전시설 조성사업			●
22	관광진흥과	공약	남사예담촌 홍보 지원 및 관광 활성화			●
23	관광진흥과	공약	생초국제조각공원 꽃잔디 확대 조성			●
24	산림녹지과	공약	군유림 밀원 식물단지 조성			●
25	산림녹지과	공약	백두대간 생태축 복원사업			●
26	산림녹지과	공약	산림 신품종 재배단지 조성			●
27	산림녹지과	공약	둔철 산림생태인프라 구축사업			●
28	환경위생과	공약	생초 민물 먹거리타운 명품화 사업 지원			●
29	지역발전과	공약	도시재생 사업(옥산지구)				●
30	지역발전과	공약	대형아파트 유치			●
31	지역발전과	공약	농산어촌 주거플랫폼 사업			●
32	지역발전과	공약	농촌공간(모례지역 돈사철거) 정비사업			●
33	지역발전과	공약	어린이 놀이마당 조성			●
34	지역발전과	시책	매촌지구 택지개발로 대형아파트 유치			●
35	경제교통과	공약	읍면 소재지권 주차난 해소 (주차장 확보)				●
36	경제교통과	공약	사회적기업, 마을기업 창업지원			●
37	경제교통과	공약	전통시장 활성화 및 경제 플랫폼 구축			●
38	경제교통과	공약	브라보 한방택시 운영 확대와 개선			●
39	경제교통과	공약	지역특화 마을기업 신활력 일자리 육성			●
40	경제교통과	공약	단계시장 활성화 방안 마련			●
41	경제교통과	공약	산청시장 주상복합 신축				●
42	안전총괄과	공약	무선 공공 인터넷망 구축사업	●
43	안전총괄과	공약	방범 cctv 설치 사업			●
44	안전총괄과	공약	취락마을 방송용 스피커 설치			●
45	건설과	공약	원지교차로 개선사업			●
46	건설과	시책	함양~울산간 고속도로 도로망 구축	●
47	상하수도과	공약	상수도 시설 확충			●
48	상하수도과	공약	공공하수처리시설 설치사업			●
49	보건정책과	공약	내과 전문의 채용 추진	●
50	보건정책과	시책	대학병원급 의료기관과의 업무협약 체결	●
51	보건정책과	공약	감염병 선제적 방역 시스템 확충			●
52	건강관리과	공약	노인 무릎 인공관절 수술비 등 지원 사업			●
53	농축산과	공약	농업보조금 확대 지급			●
54	농축산과	공약	청년 농업인, 귀농·귀촌 지원사업 확대			●
55	농축산과	공약	농촌인력 중개센터 운영		●
56	농축산과	공약	친환경 농업 인프라 확충 및 지원			●
57	농축산과	공약	직불금 확대			●
58	농축산과	공약	흑돼지 명품화 사업 지속 확대			●
59	농축산과	공약	유기축산 한우단지 확대			●
60	농축산과	공약	흑돼지 축제 개최			●
61	농축산과	공약	함양산청축협 축분퇴비유통센터 이전				●
62	농축산과	시책	한우 직거래 활성화 지원			●
63	농업진흥과	공약	기후변화에 대비한 전략 재재작물 육성			●
64	농업진흥과	공약	고품질 산청사과 명품화 지원			●
65	농업진흥과	공약	고소득 작물 스마트 4차산업 지원			●
66	농업진흥과	공약	스마트팜 청년창업 교육 시설 운영			●
67	농업진흥과	시책	딸기하우스 물 공급 시설 설치				●
68	농식품유통과	공약	산청군 먹거리통합지원센터 건립			●
69	농식품유통과	시책	도정공장 설치				●
70	농식품유통과	시책	농업 융복합 6차산업 지원 확대			●
71	농식품유통과	시책	택배 집하주차장 등 판로 시설 구축				●

2023년 하반기 군정 주요업무 평가결과

(총   괄)

□ 총괄보고

❍ 2023년 하반기 세계적인 고물가‧고금리 등 경제 한파로 인해 여려움이 가중되고 있는 중에도, 정부 각종 공모사업 선정 등에 노력한 결과, 저호지구 농어촌마을 하수도 증설사업 등 현재 사업이 추진 중인 계속사업까지 포함하여 52건, 2,643억원 규모의 사업 추진

❍ 「새로운 변화, 모두가 행복한 산청」실현을 위해 전 군민과 공무원이 힘을 모아 노력한 결과, 2023년 정보공개 종합평가 최우수 기관 선정, 전국 지역자활센터 성과평가 산청지역자활센터 최우수 기관 선정, 2023년도 공공하수도 운영관리 실태점검 발전상, 식량작물 및 안전분석 우수, 2023년(2022년 실적) 지자체 합동평가 산림분야 우수 기초지자체 선정, 2023년 산림자원분야(숲가꾸기) 우수, 2023년 지역건설사업 활성화를 위한 시군 건설업체 수주 지원 실적 평가 군부 2위 등 다양한 분야에서 성과 획득

❍ 적극적인 홍보 및 관람객 유치 활동 등 차질 없는 준비로 2023산청세계전통의약항노화엑스포 35일간, 138만 1천여명(목표인원: 120만명) 방문, 41억 4천여만원(목표수익: 36억 4천만원) 수익, 총 217개 업체 36억5천여만원 판매, 23건 210억원 상당 수출 MOU 체결 등 가시적 성과를 이루며 2023산청세계전통의약항노화엑스포를 성공 개최

❍“ON산청 빛나는 여름밤 페스티벌”등 특색있는 프로그램 운영과 적극적인 홍보활동으로 1박 이상 국내 여름휴가를 다녀온 관광객 1만7천여명을 대상으로 실시한 2023년 국내여행 종합만족도 조사에서 기초시군 1위 달성, 산청한방약초축제 정부지정‘명예 문화관광축제’ 선정 및 문화체육관광부 주관 로컬 100(지역문화매력 100선)에 동의보감촌 선정 성과 획득

❍ 고물가 등으로 어려움을 겪는 농업인들을 위하여 농업발전기금 역대 최대 규모 지원, 농촌인력 중개센터 활성화로 농촌 일손 문제 완화, 산엔청쇼핑몰 및 로컬푸드 행복장터 활성화로 농가의 농특산물 판로 확보

❍ 항노화일반산업단지 적극적 유치활동으로 ㈜산청F&B와 MOU 체결 및 산청사랑상품권 판매 확대로 소상공인 경제 활성화

❍ 산엔청복지관 분관 개관, 복지 사각지대 및 수급자 적극 발굴 등으로 사회적 약자‧취약계층의 안전망 구축, 대상포진 예방 접종비 지원 기반 마련, 노인 무릎 인공관절 수술비 지원사업 확대 등으로 누구도 소외되지 않은 복지 실현

※ 2023년 하반기 기관(단체) 표창 현황

연번	훈 격	표 창 분 야	수상부서 (단체)	부 상	비 고
1	환경부장관	2023년도 공공하수도 운영관리 실태점검	상하수도과		발전상
2	인사혁신처장	2023년 공무원 후생복지사업 우수사례 공모전	행정교육과		장려
2	농촌진흥청장	식량작물 및 안전분석 업무	농업진흥과		우수
3	산림청장	2023년 지자체 합동평가 산림분야 우수 기초지자체	산림녹지과
4	경상남도지사	2023년 산림자원분야(조림)	산림녹지과		장려
5	경상남도지사	2023년 산림자원분야(숲가꾸기)	산림녹지과		우수
6	한국환경공단 이사장	2022년도 악취기술진단 완료시설 운영관리평가	상하수도과		우수

□ 추진상황

구 분	추 진 실 적						비고
	계	완료	이행후계속추진	정상추진	장기추진	기타
계	71	7	2	54	8
군 수 공 약 사 업	57	3	1	49	4
주 요 시 책 사 업	14	4	1	5	4

※ 부서별 공약(시책) 추진실적 현황

71건 (14)	전략사업담당관 (총3건-공1,시2)	복지정책과 (총1건-공1)	행복나눔과 (총6건-공4,시2)	한방항노화과 (총3건-공2,시1)	문화체육과 (총4건-공3,시1)	관광진흥과 (총6건-공6)
	⦁정상추진 2 (공1, 시1) ⦁완료 1 (시1)	⦁완료 1 (공1)	⦁정상추진 5 (공4, 시1) ⦁완료 1 (시1)	⦁정상추진 2 (공2) ⦁완료 1 (시1)	⦁정상추진 3 (공3) ⦁장기추진 1 (시1)	⦁정상추진 6 (공6)
	산림녹지과 (총4건-공4)	환경위생과 (총1건-공1)	지역발전과 (총6건-공5,시1)	경제교통과 (총7건-공7)	안전총괄과 (총3건-공3)	건설과 (총2건-공1,시1)
	⦁정상추진 4 (공4)	⦁정상추진 1 (공1)	⦁정상추진 5 (공4, 시1) ⦁장기추진 1 (공1)	⦁정상추진 5 (공5) ⦁장기추진 2 (공2)	⦁정상추진 2 (공2) ⦁완료 1 (공1)	⦁정상추진 1 (공1) ⦁완료 1 (시1)
	상하수도과 (총2건-공2)	보건정책과 (총3건-공2,시1)	건강관리과 (총1건-공1)	농축산과 (총10건-공9,시1)	농업진흥과 (총5건-공4,시1)	농식품유통과 (총4건-공1,시3)
	⦁정상추진 2 (공2)	⦁정상추진 1 (공1) ⦁완료 2 (공1, 시1)	⦁정상추진 1 (공1)	⦁정상추진 8 (공7, 시1) ⦁장기추진 1 (공1) ⦁완료 1 (공1)	⦁정상추진 4 (공4) ⦁장기추진 1 (시1)	⦁정상추진 2 (공1, 시1) ⦁장기추진 2 (시2)

※ 완료사업(이행 후 계속추진 포함)

• 인구감소에 대한 대책 마련(청년주거자금 대출이자 지원 등)(시)
• 사회복지사 등의 처우개선비 인상 지원(공)	• 산엔청 복지관 장애인 기능 강화사업(시)
• 2023 산청세계전통의약항노화엑스포 성공개최 추진(시)
• 무선 공공 인터넷망 구축사업(공)	• 함양~울산간 고속도로 도로망 구축(시)
• 대학병원급 의료기관과의 업무협약 체결(시)	• 내과 전문의 채용 추진(공)
• 농촌인력 중개센터 운영(공)

※ 장기추진사업

• 읍면 소재지권 주차난 해소(주차장 확보)(공)	• 산청시장 주상복합 신축(공)
• 도시재생 사업(옥산지구)(공)	• 래프팅과 연계한 레저 레포츠장 설립(시)
• 함양산청축협 축분퇴비유통센터 이전(공)	• 딸기하우스 물 공급 시설 설치(시)
• 도정공장 설치(시)	• 택배 집하주차장 등 판로 시설 구축(시)

□ 주요성과

❍ 지역경제 활력사업 역점추진

- 항노화일반산업단지 적극적 유치활동으로 (주)산청F&B 투자협약(MOU)체결

- 함양~울산간 고속도로 도로망 구축으로 지역간 교통 수요 증가에 따른 지역발전 기대

- 전국 최초 기초자치단체 협력 산청-진주 상생상품권 2억원 공동 발행

- 산청사랑상품권 판매 확대로 소상공인 경제 활성화(지류 100억, 모바일 129억)

- 2023년 지역 건설 활성화를 위한 시군 지역 건설업체 수주 지원 실적 군부 2위

❍ 풍요로운 농업농촌 건설

- 금리인상과 농자재 비용, 연료비 상승 등으로 농업인의 농업 경쟁력 강화를 위해 농업발전기금 역대 최대 규모 지원

- 농촌인력 중개센터 활성화로 1400농가 6,139명 중개하여 농촌 일손 문제 완화

- 스마트팜 청년창업 교육시설 운영 및 국내외 현장 견학으로 농업의 견문 확대

- 2023 대한민국 대표과일 선발대회에서 산청 고종시 8년 연속 선정

- 산청군 농특산물 23년 11월 말 기준 1천4십만여 달러로 역대 최고 수출액 달성

- 농특산물 유통 경쟁력 강화를 위한 지원사업 강화

• 산엔청쇼핑몰 운영 활성화: 194 농가, 673개 제품

• 산엔청쇼핑몰 구독경제화 사업 추진: 68개 업체

• 고속도로 휴게소(상‧하) 로컬푸드 행복장터 활성화: 131 농가, 783개 제품

• 산엔청 마실장터 운영 활성화: 13농가, 61개 제품

❍ 모두가 행복한 따뜻한 희망복지 실현

- 산엔청복지관 분관 개관 및 운영으로 남부지역 주민의 복지 욕구 해소

- 산엔청복지관 리모델링을 통한 체력단련실 확대 운영으로 주민의 삶의 질 향상 도모

- 저소득주민 다양한 일자리 연계‧발굴로 자활사업 활성화 지원

• 경남 4개지역 자활센터 연계협력 공동브랜드 개발 ‘햇살바른 김’ 출시

• ‘해봄장터’ ‧ ‘굿모님 출장 세차’ ‧ ‘배후마을 반찬지원’ 운영

- 노인 무릎 인공관절 수술비 지원사업 적극 홍보로 대상자 발굴 및 추가 예산 확보

❍ 다시 찾고싶은 관광산청 구현

- 2023 산청세계전통의약항노화엑스포 성공개최

• 2023. 9. 15. ~ 2023. 10. 19.(35일간), 138만여명 방문, 41억원 수익

• 총217개 업체 36억원 판매, 23건 210억원 상당 수출 MOU 체결

- 적극적인 홍보활동을 통한 2023년 여름휴가 국내여행지 만족도 전국 기초지자체 1위 달성

- 동의보감촌 문화체육관광부 주관 로컬 100(지역문화매력 100선)에 선정

- 지역특색에 맞는 문화예술 공연으로 지역문화 예술 활성화 사업 추진

• 산청힐링음악회, KBS 열린음악회, 기산국악제전, 남명선비문화축제,

❍ 군민들의 행복한 삶을 위한 생활환경 조성

- 생초 노은, 생비량 방화지구 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업 준공으로 주민의 기본적인 생활 보장 및 삶의 질 향상

- 단성급수구역 지방상수도 확장(신등지구) 완료로 상수도 수혜지역 확장

- 저호지구 농어촌마을하수도 증설사업 공모사업 선정으로 공공하수도 수혜지역 확장 기반 마련

- 긴급 재난 상황시 신속한 전파를 위한 가정용 무선방송장치 구축으로 군민의 생명과 재산 보호

□ 반     성

❍ 지방소멸 위기에 대응하기 위한 우리 군 여건에 맞는 지속 가능하고 긍정적인 외부 효과를 유발할 수 있는 다양한 사업 발굴 미흡

❍ 도시재생분야 도시정책 여건변화에 따른 예산 축소로 공모 선정 지구 감소와 옥산지구만의 특화재생 분야 발굴 미흡에 따른 공모 미선정

❍ 농업 기후변화 대응 시급한 숙원사업 파악하여 지원 방안 강구하고, 열악한 농업환경 개선 및 농특산물 다양한 판로 개척으로 안정적 소득향상 필요

❍ 그 외 장기 추진 사업들은 사업 대상지 변경, 행정절차 미이행, 토지보상 협의 애로, 예산 미확보, 상부기관 승인 지연 등의 사유로 사업추진이 장기화가 우려되며 공약사업ㆍ주요시책사업 추진에 대한 담당직원들의 다각적인 노력이 요구됨

□ 향후 추진계획

❍ 인구감소지역 대응 기본계획과 연계한 다양한 지방소멸대응기금 사업 추진으로 지속적인 인구 유입 기반 마련

❍ 도시재생 특화 분야 발굴 및 국비 예산 확보를 위한 다양한 노력 경주를 통한 공모사업 추진

❍ 농업 기후변화에 대비한 전략 재배작물 육성 확대 및 고소득 작물 스마트 4차산업 지원, 스마트팜 청년창업 교육시설운영 추진, 산엔청쇼핑몰 등 농특산물 다양한 판로 개척

❍ 향후, 정상 추진중인 사업들에 대해서는 사업별 추진일정에 차질 없도록 세부계획을 지속적으로 점검·관리하고, 예산확보 미흡 등으로 사업이  지연되는 장기 사업에 대해서는 필요한 예산확보를 위해 중앙부처 방문 등 유기적 협조 체제를 통해 적극적으로 노력

❍ 사업관련 담당 직원의 공약사업ㆍ주요시책사업에 대한 관심도 제고와 사업의 원활한 추진을 위해 업무 연찬, 교육 등 활성화 요구

전략사업담당관

2023년 하반기 군정 주요업무 평가결과

(전략사업담당관)

□ 총    평

❍ 지방소멸대응기금 사업시행 및 청년층, 신혼부부에 대한 지원을 확대하여 지역 인구감소에 따른 지방소멸위기 문제에 대응함

❍ 경남 기업투자촉진지구로 지정된 항노화일반산업단지에 국내 타지역 기업 및 해외 기업들의 투자유치 유도로 서부경남 및 산청 경제와 항노화산업의 활성화를 꾀함

□ 추진상황

구 분	추진실적(건)						비 고
	계	완료	이행후 계속추진	정상 추진	장기 추진	기타
계	3		1	2
군수공약사업	1			1
주요시책사업	2		1	1

□ 주요성과(공모사업 등)

❍ 2024년 지방소멸대응기금 확보 : 69억-8개사업(2023.11월)

❍ 2023년도 하반기 지원사업 대상자 선정 및 지원금 : 2건, 1,757천원

(출산가정 1건, 전입세대 1건)

□ 향후 추진계획

❍ 2025년 지방소멸대응기금 투자계획 종합평가 상위권 달성을 위해 철저한 준비

❍ 경남도, 경남개발공사와의 지속적 협력을 통한 투자유치 방안 모색 및 활동 전개

❍ 민선8기 공약 및 시책사업의 차질 없는 추진과 전략사업 발굴 등 지속적 추진으로 특화된 산청구현 실현

구 분	공약사업
담당부서	전략사업담당관(인구정책담당)
추진진도(%)	25%

1

지방소멸대응기금 확보 및 대책 사업 추진

❍ 지역 인구감소에 따른 지방소멸 위기에 대비하여 지방소멸대응기금을 확보 후 우리 군에 적합한 사업을 발굴·추진하고자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 관내 일원

❍ 사 업 비 : 금9,600백만원(기금)

❍ 사 업 량 : 매촌지구 도시개발사업 외 6개사업

- 매촌지구 도시개발사업	- 늘비 예술 창작센터 건립
- 산엔청 청년 베이스캠프조성	지리산 산청 곶감 홍보판매장 건립
- 경호강 100리길 자전거 도로 개설	전통시장 소방 안전체계 구축
- 의료조합 찾아가는 마을 주치의 사업

❍ 사업내용

□ 추진사항

❍ 2023. 4월	: 산청군 인구감소대응에 관한 조례 제정
❍ 2023. 5월	: 인구감소대응 5개년 기본계획 및 2023년 시행계획 수립
❍ 2023. 6월	: 2024년 지방소멸대응기금 투자계획서 제출
❍ 2023. 9월	: 2024년 지방소멸대응기금 투자계획 대면평가
❍ 2023. 11월	: 2024년 지방소멸대응기금 확보(69억-8개사업)

□ 문제점 및 대책

(문제점)

❍ 인구감소에 대응하기 위한 기금 예산이 균등 배분이 아닌 지역별 평가에 따른

차등 배분으로 상위권 평가등급을 위한 예산확보 사업에 집중되어 지역소멸

위기에 대비할 우리군 여건에 적합한 실질적 사업발굴이 어려운 실정

❍ 기금예산이 편성되어 진행중인 사업의 경우 토지보상 협의 애로, 행정절차

이행에 따른 기간 소요 등의 사유로 집행실적 저조 및 사업추진 장기화 우려

(대책)

❍ 인구정책위원회, 컨설팅, 주민설문조사, 포럼 등을 통해 인구정책의 기본방향과

추진목표에 부합하는 우리 군에 적합한 사업 발굴 추진

❍ 집행 부진 사업은 세부계획을 지속적으로 점검·관리 및 지연되는 장기 사업에 대해서는 유기적 협조 체제를 통해 조기 이행 적극 추진 당부

□ 향후 추진계획

❍ 2024. 1. ~ 6월	: 2025년 지방소멸대응기금 사업 발굴 및 투자계획 수립 용역 시행 등

구 분	시책사업
담당부서	전략사업담당관(인구정책담당)
추진진도(%)	100%

2

인구감소에 대한 대책 마련

(청년주거자금 대출 이자 지원사업 등)

○ 청년층 출산가정, 신혼부부, 전입세대의 주거비 부담 완화 및 안정된

정주 여건 조성으로 인구감소 문제 해결과 군민 삶의 질 향상 도모

□ 사업개요

❍ 사 업 비 : 금45백만원(군비)

❍ 사업대상 : 관내 3개월 이상 주소를 둔 만 19세 이상 ~ 만 45세 이하 청년

❍ 사 업 량 : 출산가정‧신혼부부‧전입세대 각 15세대

(출산가정 1,500천원, 신혼부부 1,000천원, 전입세대 500천원)

❍ 사업내용 : 주거자금(주택 신축‧구입‧임차) 대출이자지원(대출 잔액의 1.5% 이내)

□ 추진사항

❍ 2023.  4월 : 상반기 청년 주거자금 대출이자 지원사업 신청 안내 공고

❍ 2023.  6월 : 상반기 지원사업 대상자 선정 및 지원금 지출

- 12건, 12,582천원(출산가정 7건, 신혼부부 3건, 전입세대 2건)

❍ 2023. 10월 : 하반기 청년 주거자금 대출이자 지원사업 신청 안내 공고

❍ 2023. 11월 : 하반기 지원사업 대상자 선정 및 지원금 지출

- 2건, 1,757천원(출산가정 1건, 전입세대 1건)

□ 향후 추진계획

❍ 2024.  4월 : 상반기 청년 주거자금 대출이자 지원사업 신청 안내 공고

❍ 2024. 10월 : 하반기 청년 주거자금 대출이자 지원사업 신청 안내 공고

구 분	시책사업
담당부서	전략사업담당관(투자유치담당)
추진진도(%)	10%

3

항노화일반산업단지 투자유치활성화

○ 경남 기업투자촉진지구로 지정된 산청 항노화일반산업단지에 국내 타지역 기업 및 해외 기업들의 투자유치 유도로 서부경남 및 산청 경제와 항노화산업의 활성화에 기여하고자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 금서면 평촌리 976번지 일원

❍ 사 업 량 : 108,212㎡, 34필지(산업시설 16, 복합시설 5, 지원시설 10, 주차장 3)

❍ 조성원가 : 산업시설 164천원/㎡, 복합용지 173천원/㎡

❍ 유치업종 : 한방식음료, 한방의료·미용 관련업종,

금속가공 ․ 전자부품, 전기장비 ․ 기계장비 ․ 운송장비 제조업,                 창고 및 운송관련 서비스업

❍ 사업시행자 : 경남개발공사(공영개발)

❍ 10개 업체 MOU체결(‘18. 3월 최종 전체 포기)	: 2016. 3월
❍ 강남구 한의사회 및 기업체 대표 분양 홍보	: 2019. 1월
❍ (주)도전과 사람 타깃업체 분양 활동(中國 중타이그룹 방문)	: 2019. 3월
❍ 산업단지 준공인가 산청군 홈페이지 분양홍보 배너 게재	: 2019. 10월
❍ 산업단지 투자유치 관계기관 간담회(경남도, 산청군, 경남개발공사)	: 2020. 3월
❍ 5개 지방지 산업단지 분양광고 게재	: 2020. 6월
❍ 투자유치 전략회의(경남도, 산청군, 창원시, 김해시, 양산시 등)	: 2020. 10월
❍ 기업투자촉진지구 지정	: 2021. 4월
❍ 복합용지 업종배치 확대 관리기본계획 변경고시	: 2021. 9월
❍ 산업단지 투자유치 관계기관 간담회(경남도, 산청군, 경남개발공사)	: 2022. 9월
❍ 공공폐수처리시설 비용부담계획 승인 신청	: 2022. 10월
❍ 산업단지 투자유치 관계기관 간담회(경남도, 산청군, 경남개발공사)	: 2022. 12월
❍ 공공폐수처리시설 비용부담계획 승인(낙동강유역환경청)	: 2023. 1월
❍ (주)산청F&B 투자협약(MOU)체결	: 2023. 10월
❍ 한방항노화일반산업단지 플랫폼 개발(경상남도)	: 2023. 11월
❍ 산업집적법에 따른 관리기본계획 변경고시(업종 추가)	: 2023. 12월
❍ 모운식품(주) 농업회사법인 분양 협의중	: 2024. 1월

□ 추진사항

□ 문제점 및 대책

❍ 경기침체에 따른 기업 투자의지 저하 및 유치업종 제한에 따른 기업 유치 난항

❍ 투자촉진지구 보조금 지원제도 적극 홍보 및 유치 업종 확대

□ 향후 추진계획

❍ 경남도, 경남개발공사와의 지속적 협력을 통한 투자유치 방안 모색 및 활동 전개

❍ 산업시설용지의 50% 이내에서 임대전용 산업용지로 전환 추진 검토

복지정책과

2023년 하반기 군정 주요업무 평가결과

(복지정책과)

□ 총    평

❍ 열악한 환경에서 근무하는 사회복지시설 종사자들의 처우개선 향상을 통하여 사회복지사 등의 지위 향상 및 사회복지서비스의 질 향상에 기여

□ 추진상황

구 분	추진실적(건)						비 고
	계	완료	이행후 계속추진	정상 추진	장기 추진	기타
계	1	1
군수공약사업	1	1
주요시책사업

□ 주요성과(공모사업 등)

❍ 2019년 1월부터 사회복지사 및 요양보호사 등 처우개선비 지원

❍ 2019년 350명 123백만원 지원

❍ 2020년 358명 129백만원 지원

❍ 2021년 313명 112백만원 지원

❍ 2022년 349명 125백만원 지원

❍ 2023년 379명 227백만원 지원 (처우개선비 인상분 반영)

❍ 2024년 488명 292백만원 예산확보

□ 향후 추진계획

❍ 인상된 처우개선비 계속 지원 : 2023년 1월 시행

- 22년 : 월 3만원 → 23년 : 월 5만원(증 2만원)

구 분	공약사업
담당부서	복지정책과(복지기획담당)
추진진도(%)	100%

4

사회복지사 등의 처우개선비 인상 지원

○ 사회복지현장 최일선에서 근무하는 사회복지시설 종사자의 처우개선

향상을 통하여 사회복지사 등의 지위 향상 및 사회복지 서비스의 질

향상에 기여

□ 사업개요

❍ 지원대상 : 사회복지시설에 종사하는 사회복지사 및 장기요양요원 등

❍ 지원조건 : 산청군 관내 주소를 두고, 월 20일 이상, 일 8시간 이상

근무하는 종사자

❍ 소요예산 : 금1,468백만원(군비)     ※ 2024년 예산 292백만원

❍ 사업내용 : 처우개선비 인상 지원

- 지원인원 : 488명

- 인상지원 : (기존) 월 3만원 → (변경) 월 5만원(증 2만원)

□ 추진사항

❍ 사업추진(처우개선비 인상 지원)    :   2023.  1월 ~ (매월 지급 중)

□ 문제점 및 대책

❍ 해당사항 없음

□ 향후 추진계획

❍ 인상된 처우개선비 계속 지원

- 22년 : 월 3만원 → 23년 : 월 5만원(증 2만원)

행 복 나 눔 과

2023년 하반기 군정 주요업무 평가결과

(행복나눔과)

□ 총    평

❍ 장애인·여성·노인 등 다양한 계층을 대상으로 맞춤형사업을 추진하여 복지만족도 증대에 기여함.

□ 추진상황

구 분	추진실적(건)						비 고
	계	완료	이행후 계속추진	정상 추진	장기 추진	기타
계	6	1		5
군수공약사업	4			4
주요시책사업	2	1		1

□ 주요성과(공모사업 등)

❍ 2023년 홀로어르신 가구 일산화탄소 경보기 400대 설치

❍ 2023년 하반기 응급안전안심서비스 신규장비 180대 추가 설치

❍ 2023년 하반기 산엔청복지관 분관 신축 및 개관 운영

❍ 2023년 산엔청복지관 리모델링 준공

□ 향후 추진계획

❍ 다문화가족 자년 헤어컷비 지원 조례 제정 및 ‵24년 추경 예산 확보

❍ 산엔청복지관 이용자 추가 모집 및 프로그램 확대 운영

구 분	공약사업
담당부서	행복나눔과(장애인복지담당)
추진진도(%)	5%

5

산청군 장애인회관 신축

○ 관내 산발적으로 분산되어 있는 장애인 복지시설 및 단체를 장애인회관 신축으로 통합 관리·운영하여 장애인복지 서비스 향상 도모

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 금서면 매촌리 산11-1 일원

❍ 사업기간 : 2021 ~ 2025년

❍ 사 업 비 : 금7,000백만원

(특별교부세 2,000, 특별조정교부금 1,500, 도비 1,200, 군비 2,300)

❍ 사 업 량 : 2층 규모, 연면적 1,865.91㎡

❍ 사업내용 : 건물 1동 신축

□ 추진사항

❍ 지방재정투자심의(군)                      : 2020. 11. 10.

❍ 공유재산 관리계획 승인                   : 2020. 11. 16.

❍ 공공건축 사업계획 사전검토               : 2020. 12 .23.

❍ 산청군 공공건축심의위원회 심의           : 2021. 7. 2.

❍ 기본계획 및 실시설계 용역                : 2022. 3. 21. ~ 12. 28.

❍ 공사착공 및 중단                         : 2023. 5. 1. / 2023. 9월

❍ 지반 안정성 용역                         : 2023. 9. 5. ~ 11. 8.

□ 문제점 및 대책

❍ 지반 안정성 문제 발생으로 추가 사업비 증가 및 공기 연장 필요

□ 향후 추진계획

❍ 지방재정투자 재심사(도)→의회행정간담회→공유재산관리계획(변경)

→예산 확보→공사 재개→완공

구 분	공약사업
담당부서	행복나눔과(여성가족담당)
추진진도(%)	50%

6

다문화가족 자녀 헤어컷 비용 지원 헤어컷지원(HY견고딕, 24)

○ 다문화가족 자녀에 대한 헤어컷 비용 지원으로 다문화가족의 양육 부담

경감 및 생활안전 및 지역사회 소속감 고취

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2023년 ~ 2026년

❍ 총 소요예산 : 금246백만원(군비)

❍ 사 업 량 : 320여명(18세 이하 다문화가족 자녀)

❍ 사업내용 : 1인당 연 240천원(월20천원) 헤어컷 비용 지원

□ 추진사항

❍ 관내 다문화가족 실태 조사 및 다양성 욕구 파악  : 2022. 12월

❍ 세부 추진계획 수립                             : 2023.  3월

❍ 보건복지부 사회보장제도 신설 협의              : 2023.  11월

□ 문제점 및 대책

❍ 해당 없음

□ 향후 추진계획

❍ 다문화가족 자녀 헤어컷비 지원 조례 제정        : 2024.  4월

❍ 2024년 추경 예산 확보                          : 2024.  5월

❍ 바우처카드 업무 협약 체결                      : 2024.  6월

❍ 읍면 신청 접수 및 사업 시행                    : 2024.  7월

구 분	공약사업
담당부서	행복나눔과(여성가족담당)
추진진도(%)	10%

7

성폭력 전문상담소 운영

○ 성폭력·가정폭력 피해 발생시 피해자에 대한 신속한 상담 및 치료 등

지원서비스 제공을 통한 적극 대처 및 보호 지원체계 구축

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 신안면(청소년 문화의 집 1층)

❍ 사업기간 : 2023년 ~ 2026년

❍ 총 소요예산 : 금300백만원(군비)

❍ 사 업 량 : 성폭력 상담소 설치 운영 1개소

❍ 사업내용 : 관내 성폭력 및 가정폭력 상담, 교육, 예방활동 등

□ 추진사항

❍ 경남 도내 성폭력 상담소 현황 파악

❍ 신안 청소년 문화의 집 내 성폭력 전문상담소 조성 설계 반영 및 착공 예정

□ 문제점 및 대책

❍ 해당 없음

□ 향후 추진계획

❍ 세부 추진계획 수립                             : 2025.  1월

❍ 2025년 추경 예산확보                           : 2025.  5월

❍ 상담소 위탁운영 공고 및 선정                   : 2025.  7월

❍ 성폭력 전문상담소 운영                         : 2025.  7월

구 분	공약사업
담당부서	행복나눔과(노인복지담당)
추진진도(%)	70%

8

산청형 어르신 통합돌봄 서비스 추진

○ 일상생활 영위가 어려운 취약노인에게 적절한 돌봄서비스를 제공하여 안정적인 노후생활 보장, 신체적ㆍ정신적 건강 유지 및 노인 욕구에 맞는 서비스 제공으로 예방적 복지를 도모

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2022. 8. ~ 2026. 12월

❍ 사 업 비 : 금22,589백만원(국비 10,681, 도비 2,320, 군비 9,588)

- 2024년 사업비 4,857백만원(국비 2,346, 도비 456, 군비 2,055)

❍ 사업내용 : 맞춤형 돌봄서비스(말벗지원, 일상생활지원, 식사배달, 생활교육, 응급구조, 인공지능(ICT)연계 서비스 등)를 제공하여 노인의 기능ㆍ건강 유지 및 악화 예방

사업명	인원(명)	사업비(백만원)	사업내용	비고
소 계	4,694	4,857
노인맞춤돌봄	2,048	3,169	안전·안부지원, 생활교육, 일상생활지원, 민간후원연계 등
재가노인지원	400	1,200	말벗지원, 사회참여활동 등
식사배달지원	186	148	주 1회 밑반찬 배달	자체
무료빨래방	1,000	50	세탁물 방문 수거 및 빨래	자체
응급안전알림	760	141	화재, 가스, 활동감지기를 통한 응급구조
ICT연계 통합돌봄	300	149	AI 말벗지원 및 IoT 응급구조

□ 추진사항

❍ 2022. 7월 : 산청형 어르신 통합돌봄 서비스 추진계획 수립

❍ 2022. 12월 : 사업 내실화를 위한 무료빨래방 등 사업 장비 교체

❍ 2022. 12월 : 사업 운영사항 점검 및 평가

❍ 2023. 6월 : 응급안전안심서비스 신규장비 120대 추가 설치

❍ 2023. 8월 : 홀로어르신 가구 일산화탄소 경보기 400대 설치

❍ 2023. 8월 : 응급안전안심서비스 신규장비 100대 추가 설치

❍ 2023. 12월 : 응급안전안심서비스 신규장비 80대 추가 설치

□ 향후 추진계획

❍ 수시 :  산청형 어르신 통합돌봄 서비스 대상자 발굴 및 확대 지원

❍ 2024. 12월 : 사업 운영사항 점검 및 평가

구 분	시책사업
담당부서	행복나눔과(장애인복지담당)
추진진도(%)	100%

9

산엔청복지관 장애인 기능 강화사업

○ 산엔청복지관의 장애인 기능강화를 통하여 복지욕구에 따른 맞춤형 서비스를 제공하고 주민의 삶의 질 향상을 도모하고자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 산청읍 중앙로 87, 단성면 성내리 198번지 일원

❍ 사 업 비 : 금680백만원(기금 200, 군비 480)

❍ 사 업 량 : 리모델링 1식(3층 규모, 연면적 2,500.63㎡)

❍ 사업내용

- 산엔청복지관 본관 리모델링(체력 단련실 확대, 프로그램실 확충,

옥상∙식당 방수, 샤워실, 저온저장고, 상담실 설치 등)

□ 추진사항

❍ 지방소멸대응기금(사회복지관 활력지원사업) 확정  : 2022.  9. 28.

❍ 산엔청복지관 리모델링 설계용역 완료            : 2023.  5. 13.

❍ 산엔청복지관 리모델링 착공                     : 2023.  8. 4.

❍ 산엔청복지관 리모델링 준공                     : 2023. 12. 07.

❍ 산엔청복지관 리모델링 공작물 사용 승인         : 2023. 12. 29

□ 문제점 및 대책

❍ 해당 없음

□ 향후 추진계획

❍ 산엔청복지관 이용자 추가 모집 및 프로그램 확대 운영 : 연중

구 분	시책사업
담당부서	행복나눔과(여성가족담당)
추진진도(%)	50%

10

조손가족 손자녀 특기활동비 지원

○ 조손가족 손자녀의 특기활동비 지원사업을 통한 교육비 부담 경감과

차별 없는 교육보장으로 조손가정의 생활안정 및 복지증진에 기여

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2023년 ~ 2026년

❍ 사 업 비 : 금210백만원(군비)

❍ 사 업 량 : 45세대 55명(18세 이하 조손가족 아동)

❍ 사업내용 : 1인당 연 120만원 이내(월 10만원) 학습비 지원

□ 추진사항

❍ 관내 조손가족 현황 및 다양성 욕구 파악         : 2022. 12월

❍ 조손가족 손자녀 특기활동비 지원 계획 수립      : 2023.  3월

❍ 보건복지부 사회보장제도 신설 협의              : 2023. 10월

□ 문제점 및 대책

❍ 해당 없음

□ 향후 추진계획

❍ 한부모가족 지원 조례 정비                      : 2024. 4월

❍ 2024년 추경 예산 확보                          : 2024. 5월

❍ 사업 시행 및 홍보                              : 2024. 7월

한방항노화과

2023 하반기 군정 주요업무 평가결과

(한방항노화과)

□ 총    평

❍ 2023 산청세계전통의약항노화엑스포 성공개최로 한의약의 우수성을 전 세계에 알림과 동시에 항노화산업 육성과 대한민국의 대표 힐링관광지로서의 위상 제고

❍ 동의보감촌 관광체험시설, 콘텐츠 및 편의시설 확충 등 웰니스관광 브랜드 제고로 동의보감촌 활성화 도모

□ 추진상황

구 분	추진실적(건)						비 고
	계	완료	이행후 계속추진	정상 추진	장기 추진	기타
계	3	1		2
군수공약사업	2			2
주요시책사업	1	1

□ 주요성과(공모사업 등)

❍ 2023 산청세계전통의약항노화엑스포 성공개최

- 2023. 9. 15. ~ 2023. 10. 19.(35일간), 138만여명 방문, 41억원 수익

❍ 제23회 산청한방약초축제 2023산청엑스포 연계개최로 시너지효과 창출

- 연계행사 : 산청혜민서, 산엔청청정골 명품관, 힐링약초정원 등

- 제23회 산청한방약초축제 정부지정 ‘명예문화관광축제’ 선정

❍‘한방·항노화의 달’(매년 10월한달) 지정 및 선포식 개최(2023.10.6.)

- 조례개정 :「산청군 항노화산업 육성 및 지원에 관한 조례」개정(2023.9.14.)

❍ 유네스코 세계기록유산「동의보감」국내외 홍보사업 추진

- 2023 벨기에 오메강 축제 및 독일 하노버 코스메티카 박람회 참가

- 국제학술포럼·컨퍼런스 개최, 산청한의학박물관 특별전 개최

❍ 동의보감촌 기반·편의시설 정비로 2023산청엑스포 성공 뒷받침

- 전시공간 리뉴얼 : 엑스포 주제관, 산청한의학박물관, 야외전시시설

- 관광체험시설 및 편의시설 확충, 민간위탁시설 환경개선사업 추진

□ 향후 추진계획

❍ 엑스포 이후 동의보감촌의 지속 가능한 운영체계 구축을 위한 연구용역 추진

- 시설물의 효율적인 관리, 다각적인 수익모델 발굴, 다양한 콘텐츠

확충으로 글로벌 명소화 육성방안 마련

구 분	공약사업
담당부서	한방항노화과 (약초경영담당)
추진진도(%)	50%

11

산청형 한방약초 생산기반 및 유통시스템 개선

○ 약초재배 농가의 생산비 절감 지원으로 안정적 생산기반 조성

○ 다양한 약초 판로확보를 통한 농가소득 증대 및 약초산업 활성화

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 관내 일원

❍ 사업기간 : 2022 ~ 2026년

❍ 총 소요예산 : 2,119백만원(도비114.4, 군비937.6, 자부담817, 기금250)

❍ 사업내용

- 전략약초 및 한방약초안정생산지원

- 백도라지 지역특화작목단지 육성

- 약초 수매 도입

- 약초생산 수매보조금 지원

- 약초재배 전문기술교육 확대 추진

□ 추진사항

❍ 전략약초 및 한방약초안정생산지원사업

- 2022. 1. ~ 12월 : 31농가, 16종, 11.2ha

- 2023. 1. ~  9월 : 36농가, 19종, 13.5ha

❍ 백도라지 분양 및 현장점검

- 2022. 4. ~ 10월 : 1차 년도/8농가, 1.6ha, 25만주 식재)

- 2023. 4. ~  6월 : 2차 년도/6농가, 1.5ha, 25만주 식재)

❍ 약초재배 전문기술교육 추진 및 수료

- 2022. 7. ~  8월 : 총 34명 수료(일반과정 21명, 심화과정 13명)

- 2023.      11월 : 총 41명 수료(일반과정 22명, 심화과정 19명)

❍ 약초생산 수매보조금지원사업

- 2022. 1. ~ 12월 : 13농가, 4종, 22ton, 23,543천원

- 2023. 1. ~ 12월 : 18농가, 6종, 37.6ton, 46,892천원

□ 문제점 및 대책

❍ 단순변심, 종자ㆍ종근 미확보, 식재적기 미식재 등의 사유로 사업 포기자 다수 발생

→ 당해 연도 사업 포기자 추후 사업대상자 선정 시 패널티 적용

❍ 약용작물의 소비위축, 판로 미확보로 인한 약초재배 농가 및 면적 지속적 감소

→ 지역 특성에 맞는 약초 육성, 가공상품 개발 지원, 계약 재배 및          유통망 확보로 약초산업 경쟁력 강화

□ 향후 추진계획

❍ 2024. 1. ~ 12월 : 2024년 약초 수매 연중 실시

❍ 2024. 1. ~ 12월 : 2024년 약초생산 수매보조금 지원

❍ 2024. 1. ~ 12월 : 2024년 약초재배 현장점검 및 관리지도

❍ 2024. 6. ~  8월 : 2024년 백도라지 지역특화작목육성 현장점검

❍ 2024. 7. ~  8월 : 2024년 약초재배 전문기술교육 추진

구 분	공약사업
담당부서	한방항노화과 (관리운영담당, 시설사업담당)
추진진도(%)	70%

12

동의보감촌 지속가능한 운영체계 구축

○ 동의보감촌 내 시설개선, 체험 콘텐츠 확충, 입장료 징수방안 마련을 통한 지속 가능하고 효율적인 관광지 운영체계 구축

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 금서면 동의보감촌 일원

❍ 사업기간 : 2022 ~ 2024년

❍ 총 소요예산 : 18,491백만원(국비 1,125, 도비 937, 군비 16,429)

❍ 사업내용

- (시설개선) 엑스포 주제관 및 야외전시시설 리뉴얼, 특리지구 관광체험시설 부지조성 등

- (체험 콘텐츠) 스마트 공립박물관 구축, 체험 프로그램 보완·확충, 문화플랫폼 구축사업

- (관리운영) 동의보감촌 활성화방안 연구용역 추진

□ 추진사항

❍ 2021. 10월 ~ 2023. 8월 : (시설개선) 특리지구 관광체험시설 부지조성(임시주차장)

❍ 2023.  1. ~ 8월 : (시설개선) 엑스포주제관, 야외전시시설 리뉴얼 사업

❍ 2023.  1. ~ 7월 : (체험 콘텐츠) 스마트 공립박물관 구축사업 사업

❍ 2023.  8월   : (관리운영) 입장료 징수방안 수립을 위한 방문객 설문조사 실시

□ 문제점 및 대책

❍ 동의보감촌 입장료 징수 시 입주자와 협의 난항 예상

→ 명품관광지 조성을 위한 합리적인 징수 방안 모색

□ 향후 추진계획

❍ 2024. 1. ~ 12월 : (체험 콘텐츠) 동의보감 문화플랫폼 구축사업 실시설계 용역

❍ 2024. 3. ~  9월 : (관리운영) 동의보감촌 활성화방안 연구용역 추진

구 분	시책사업
담당부서	한방항노화과(엑스포TF담당)
추진진도(%)	100%

13

2023 산청세계전통의약항노화엑스포 성공개최 추진

○ 2023엑스포 개최로 국민건강 향상, 국가경쟁력 제고 및 산청군 항노화산업 육성과 대한민국 대표 힐링관광지로 자리매김

□ 사업개요

❍ 주    제 :“미래의 약속, 세계 속의 전통의약”

❍ 기    간 : 2023. 9. 15. ~ 10. 19.(35일간)

❍ 위    치 : 동의보감촌(주행사장), 산청IC축제광장 일원(부행사장)

❍ 참가규모 : 약 30개국, 관람객 120만명(외국인 6만명)

국내‧외 150개 관련 기업, 200명 바이어 참가

❍ 사 업 비 : 14,740백만원(국비 3,700, 도비 3,100, 군비 4,300, 수익/기타 3,640)

❍ 사업내용 : 전시, 이벤트, 컨벤션․관광 등

□ 추진사항

❍ 2021.  8월 : 국제행사 개최 승인(기획재정부)

❍ 2022.  1월 : 엑스포 조직위원회 사무처 출범

❍ 2022.  4월 : 위원총회, 자문위원회 구성(위원 29명, 자문위원 49명)

❍ 2022. 10월 : 조직위원회 공동위원장 선임(산청군수)

❍ 2022. 12월 : 엑스포 실행계획 수립 및 행사 대행 계약 체결

❍ 2023.  4월 : 재단법인 이사장 변경(경상남도지사→경상남도 경제부지사)

❍ 2023.  4월 : 조직위원회 민간공동조직위원장 선임(구자천 회장)

❍ 2023.  7월 : 임시전시관 및 시설물 설치

❍ 2023.  8월 : 엑스포 종합운영계획 및 운영매뉴얼 작성

❍ 2023. 9. ~ 10월 : 엑스포 개최

❍ 2023. 11.~ 12월 : 엑스포 임시시설 철거 등 회장 정리

□ 주요성과

❍ 관 람 객 : 138만 1,260명(목표 120만명 대비 115.1%)

❍ 수익실적 : 4,143백만원(목표 3,640백만원 대비 113.8%)

❍ 판매실적 : 총 217개 업체, 3,655백만원

❍ 수출 MOU 체결 : 23건, 1,552만 달러(한화 210억 원 상당)

문화체육과

2023년 하반기 군정 주요업무 평가결과

(문화체육과)

□ 총    평

❍ 지역 특색에 맞는 문화예술 공연으로 지역주민과 방문객에게 수준 높은 문화향유 기회를 제공하고, 개인과 단체에 대한 문화예술 활동지원, 문화기반시설 확충을 통한 문화 복지 향상 및 다양한 평생 교육 기회 제공으로 품격 높은 문화 도시형성에 이바지 함.

❍ 노후되고 훼손된 문화재를 보수하고 문화재 주변을 체계적으로 정비하여 우리 겨레의 소중한 문화유산인 문화재를 양질의 상태로 보존 및 전승함.

❍ 공공체육시설 확충 및 유지보수를 통해 군민에게 쾌적하고 다양한 체육 시설을 제공, 체계적인 관리로 군민의 건강증진 및 삶의 질 향상에 이바지 함.

□ 추진상황

구 분	추진실적(4건)						비 고
	계	완료	이행후 계속추진	정상 추진	장기 추진	기타
계	4			3	1
군수공약사업	3			3
주요시책사업	1				1

□ 주요성과(공모사업 등)

❍ 지역특색에 맞는 문화예술 공연으로 지역문화 예술 활성화 사업 추진(문화예술담당)

- 산청힐링음악회, KBS 열린음악회, 기산국악제전, 남명선비문화축제, 2023 상설문화관광프로그램 운영, 방방곡곡문화공감 공연, 상주단체 공연 등

❍ 문화기반시설 유지 보수 및 확충 사업 추진(문화예술담당)

- 산청문화예술회관 시설 유지보수 등

- 산청군 늘비예술창작센터 건립사업 추진

- 큰들 마당극장 건립사업 추진

❍ 체계적인 전통문화유산 계승 및 전승사업 추진(문화재담당)

- 산청 · 단성향교 제례 및 전통문화계승사업, 서원 제례 지원 등

❍ 체계적인 문화재 보수정비사업 추진(문화재담당)

- 국가지정문화재 보수사업, 도지정문화재 보수정비사업 등

❍ 생활체육 활성화를 통한 건강 산청 이미지 제고(체육행정담당)

❍ 체육시설 확충 및 유지관리를 통한 군민의 건강하고 활기찬 생활 원동력 조성(체육시설담당)

□ 향후 추진계획

❍ 산청군 행복문화센터 건립 2024. 2월 공공건축지원센터 사업계획 사전검토 재실시 예정

❍ 산청군 늘비예술창작센터 건립사업 2024. 4월 착공 및 12월 준공 예정

❍ 큰들 마당극장 건립사업 2024. 2월 준공 예정

❍ 생초면 전지훈련 센터 및 생초면 파크골프장 조성을 위한 행정절차 지속 이행

구 분	공약사업
담당부서	문화체육과(문화예술담당)
추진진도(%)	15%

14

산청군 행복문화센터 건립

○ 문화예술활동 기반시설의 부족 해결을 위한 중소규모 공연장, 전시장,

교육장 등의 건립으로 문화예술 활성화에 기여

□ 사업개요

❍ 위    치: 산청군 산청읍 지리 327-4번지 일원

❍ 사업기간: 2022. 7. ~ 2025. 12월

❍ 총 소요예산: 금6,000백만원(도비 3,000, 군비 3,000)

※ 제3단계 지역균형발전개발사업 예산 확정

❍ 사업내용: 행복문화센터 건립(지상 3층, 건축연면적 1,226㎡)

층별	세부시설 설치계획	비고
지상 1층	상설 전시실, 강의실 등(396㎡)
지상 2층	공연장, 공연 준비실, 무대장비 조작실 등(396㎡)
지상 3층	공연장, 강의실 등(396㎡)

□ 추진사항

❍ 공유재산 심의 및 관리계획 승인                 : 2022. 10. ~ 12월

❍ 지방재정 투자심사 심의 및 건축기획용역 실시                : 2023.  2. ~ 3월

❍ 공공건축지원센터 사업계획 사전검토             : 2023. 7월

❍ 제3단계 지역균형발전개발사업 예산 확정          : 2023. 7월

❍ 공유재산관리계획(변경) 승인                         : 2023. 12월

□ 향후 추진계획

❍ 공공건축지원센터 사업계획 사전검토 재실시          : 2024. 2월

❍ 공공건축심의위원회 기획 심의                   : 2024. 3월

❍ 추경예산 확보                                  : 2024. 5월

❍ 설계공모 관리 용역                             : 2024. 6월

❍ 실시설계용역                                   : 2024. 9월

❍ 공사 착공 및 준공                                   : 2025. 4. ~12월

구 분	공약사업
담당부서	문화체육과 문화예술담당
추진진도(%)	50%

15

한국선비문화연구원 활성화 지원

○ 고품격 선비문화 체험연수를 통한 선비정신 확산으로 물질위주 사고에서 비롯되는 제반 문제를 완화함으로써 국민행복과 화합, 국가 사회 발전에 기여

□ 사업개요

❍ 위    치: 산청군 시천면 남명로240번길 33, 한국선비문화연구원

❍ 사업기간: 2022. 7. ~ 2026. 12월

❍ 총 소요예산: 금6,000백만원(국비 3,500, 도비 1,250, 군비 1,250)

- 2024년 사업비 1,100백만원 (국비 635, 도비 232.5, 군비 232.5)

❍ 사 업 량: 남명 선비문화 체험연수 활성화 사업 지원

❍ 사업내용

- 한국선비문화 체험연수(국·도비) 및 찾아가는 선비문화교실 운영
- 청렴리더십 아카데미 운영, 온라인 프로그램 강좌 운영

- 시설물 유지보수(군비)

- 연수 수료 후 설문조사 내용 반영을 통한 개선방안 마련

□ 추진사항

❍ 2020년 선비문화 체험연수 115회  7,522명         : 2020. 1. ~ 12월

❍ 2021년 선비문화 체험연수 131회  8,709명         : 2021. 1. ~ 12월

❍ 2022년 선비문화 체험연수 181회  11,584명        : 2022. 1. ~ 12월

❍ 2023년 선비문화 체험연수 162회  12,627명        : 2023. 1. ~ 12월

□ 향후 추진계획

❍ 2024년 1차 보조금 교부                          : 2024.  2월

구 분	공약사업
담당부서	문화체육과(체육시설담당)
추진진도(%)	40%

16

공공체육시설 확충

○ 공공체육시설의 확충으로 주민들의 여가생활 개선 및 체력증진과 공공체육시설의 체계적 유지·관리로 이용주민의 안전사고 예방 및 만족도 향상에 기여하고자 함

□ 사업개요

❍ 위    치: 산청군 관내 일원(산청읍, 오부면, 생초면, 단성면 등)

❍ 사업기간: 2022. 7. ~ 2026. 12월

❍ 총 소요예산: 금18,200백만원(국비 12,000, 도비 770, 군비 5,430)

❍ 사 업 량: 생초면 전지훈련 지원센터 조성 1개소, 파크골프장 조성 4개소

❍ 사업내용

- 생초면 전지훈련 지원센터 및 축구장 조성

- 산청읍, 오부면, 생초면, 단성면 파크골프장 조성

□ 추진사항

❍ 생초면 전지훈련 지원센터 및 축구장 조성

- 생초 중·고교 활용방안 수립 용역 시행               : 2023. 5월

- 공유재산 관리계획 승인                              : 2023. 9월

❍ 산청읍 파크골프장 조성사업 착공                        : 2023. 3월

❍ 오부면 파크골프장 조성사업 준공                      : 2023. 6월

❍ 생초면 공공파크골프장 조성

- 실시설계용역 및 소규모환경영향평가 용역 시행        : 2022. 8월

- 하천관리계획 복원지구→친수지구 변경건의(낙동강유역환경청) : 2022. 9월

❍ 단성면 파크골프장 조성사업 준공                      : 2023. 5월

□ 문제점 및 대책

❍ 생초면 공공파크골프장 하천기본계획 변경 등 행정절차 지연

⇒ 하천관리청과 유기적 협의로 행정절차 조기 이행

□ 향후 추진계획

❍ 산청읍 파크골프장 조성

- 공사 착공 및 준공(잔여분)                  : 2024. 3. ~ 6월

❍ 생초면 공공파크골프장 조성

- 하천점용허가 및 소규모환경영향평가 협의   : 2024. 6월

- 2025년 지방전환사업 예산 신청             : 2024. 8월

- 공사 착공 및 준공                         : 2025. 3. ~ 6월

❍ 생초면 전지훈련 지원센터 및 축구장 조성

- 생초중학교 매입                           : 2024. 6월

- 기본계획 및 실시설계용역                  : 2024. 8월

- 공사 착공 및 준공                          : 2025. 6. ~ 2026. 10월

구 분	시책사업
담당부서	문화체육과(체육행정담당)
추진진도(%)	10%

17

래프팅과 연계한 레저레포츠장 설립

○ 래프팅타운의 활성화를 통해 지역경제활성화를 도모하고 산청군 대외 홍보에 기여하기 위함

□ 사업개요

❍ 위    치: 산청읍 꽃봉산로34번길 77(래프팅타운)

❍ 사 업 비: 1,500백만원

❍ 사 업 량: 노후 래프팅 사무실 철거 1식, 레포츠 시설물 설치 1식 등

❍ 사업내용

- 노후 래프팅 사무실 철거, 공동 시설물 또는 개인 컨테이너식 시설물 설치

- 4계절 복합 레포츠장 설립(캠핑장, 서바이벌장 등)

□ 추진사항

❍ 래프팅타운 발전방향 모색을 위한 간담회 개회          : 2022. 8월

❍ 래프팅타운 운영현황 및 의견 청취                     : 2023. 5월

□ 문제점 및 대책

❍ 래프팅타운 입주 업체별 이해관계가 다양하여 의견 수렴에 애로

❍ 레저레포츠장 조성에 대한 부정적 의견 다수(사업 폐기)

→ 시설 개보수 등 소규모 수리수선사업으로 전환 시행

□ 향후 추진계획

❍ 래프팅타운 누수수리, 데크수선 등 수리수선사업 시행    : 2024. 3월

관광진흥과

2023년 하반기 군정 주요업무 평가결과

(관광진흥과)

□ 총    평

❍ “대원사 계곡길 연장 사업”과 “밤머리재 터널과 연계한 관광벨트 구축사업”, “중산관광지 활성화 사업”은 대원사 계곡길 1.5km의 생태탐방로 연장, 기존 밤머리재 단풍도로를 활용한 밤머리재 명품로드 10km 조성, 중산관광지 물소리 빛광장, 하늘정원, 숲체험시설 등의 조성사업으로 정상 추진중에 있으며, 이로 인해 지리산 관광벨트를 구축하고 지역소멸 대응 생활인구를 확대하여 체류여행 활성화 및 지역여행 소비 촉진을 제고할 것이며

❍ “황매산 관광객 편의시설 조성 사업”, “남사예담촌 홍보지원 및 관광 활성화 사업”,“생초국제조각공원 꽃잔디 확대 조성 사업”도 정상 추진 중이며 특색있는 관광 인프라를 구축, 다양한 매체를 통한 홍보 마케팅 강화 사업으로 완료 후 주변 상권이 활성화될 것으로 예상됨

□ 추진상황

구 분	추진실적(건)						비 고
	계	완료	이행후 계속추진	정상 추진	장기 추진	기타
계	6			6
군수공약사업	6			6
주요시책사업

□ 주요성과(공모사업 등)

❍ 적극적인 홍보활동을 통한 여름휴가 여행지 만족도 전국 지자체 1위 달성

❍ ON산청 여름밤 페스티벌 등 새로운 축제 개최를 통한 지역경제 활성화 기여

❍ 산업관광 육성사업 추진 및 특색 있는 팸투어 운영으로 체류형 관광 활성화 유도

❍ 대원사 계곡길 연장사업은 실시설계용역을 진행중이며, 토지사용에 대한 협의를 우선적으로 시행하여 사전 협의 완료

❍ 밤머리재 터널과 연계한 관광벨트 구축은 국도비 및 군비예산 6억원을 확보하여 기본 및 실시설계용역 시행 완료

❍ 중산관광지 활성화 사업은 실시설계용역 및 공법심의를 완료 공사 추진중

❍ 황매산 관광객 편의안전시설 조성사업은 인도교 기초 공사 완료

□ 향후 추진계획

❍ 공약사업 4건은 현재 2024년 예산을 확보하여 정상추진중에 있음

- 대원사 계곡길 연장사업: 2025년 하반기 완료 예정

- 밤머리재 터널과 연계한 관광벨트 구축사업: 2024년 실시설계용역 및 행정절차 이행, 2026년 사업 완료 예정

- 중산관광지 활성화 사업 : 2024년 하반기 완료 예정

- 황매산 관광객 편의안전시설 조성사업 : 2024년 상반기 완료 예정

구 분	공약사업
담당부서	관광진흥과(관광개발담당)
추진진도(%)	10%

18

대원사 계곡길 연장사업

○「남한 제일의 탁족처(濯足處)」라 불리는 지리산 대원사 계곡을 따라 조성된「대원사 계곡길」을 연장하여 지리산을 찾는 탐방객에게 수려한 자연경관과 볼거리를 제공하고 국내 최고의 생태체험 및 힐링 공간으로 조성

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 삼장면 유평리 일원

❍ 사 업 비 : 금3,100백만원(균특 1,500, 도비 450, 군비 1,150)

❍ 사 업 량 : 생태탐방로 조성 L=1.5km

❍ 사업내용                                          (금액단위: 백만원)

연 도	사업비	사업 추진 내용	비 고
2023	300	·대원사계곡길 연장사업 실시설계 및 관련기관 협의	진행중
2024	800	·대원사계곡길 연장사업 L=0.5km	예정
2025	2,000	·대원사계곡길 연장사업 L=1.0km	예정

□ 추진사항

❍ 관광자원개발사업(균특전환) 건의                      : 2022. 7월

❍ 관광자원개발사업(균특전환) 예산 확정(실시설계용역비)   : 2023. 1월

❍ 실시설계용역 및 탐방로 입지적정성평가 작성 용역 시행: 2023. 3월

□ 문제점 및 대책

❍ 문제점 : 해당지역이 국립공원구역으로 탐방노선에 대한 행정절차 선행 필요

☞ 대책 : 국립공원구역 탐방로 입지적정성평가 신청을 통한 노선협의

□ 향후 추진계획

❍ 지리산 국립공원 협의 및 탐방로 입지적정성평가: 2024. 1. ~ 2024. 4월

❍ 공사 착공 및 준공                        : 2024. 6. ~ 2025. 12월

구 분	공약사업
담당부서	관광진흥과(관광개발담당)
추진진도(%)	5%

19

밤머리재 터널과 연계한 관광벨트 구축

○ 지리산으로 가는 대표적 관문이며 가을철 단풍길로 유명한 밤머리재터널

개통으로 기존 도로와 유휴공간을 활용하여 생태문화체험공간 등 지리산

생태관광 거점 조성

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 금서면 향양리 ~ 삼장면 홍계리 일원

❍ 사 업 비 : 금3,000백만원(국비 1,500, 도비 450, 군비 1,050)

❍ 사 업 량 : 밤머리재 명품로드 조성 L=10km

❍ 사업내용                                          (금액단위: 백만원)

연 도	사업비	사업 추진 내용	비 고
2023	600	·지역개발구역지정 및 실시설계용역	진행중
2024	1,000	·단풍나무 보식, 전망대 및 포토존 설치	예정
2025	1,400	·웅석봉 등산로 입구정비, 생태공원 조성 등	예정

□ 추진사항

❍ 백두대간권 발전종합계획 핵심사업 선정               : 2021. 5월

❍ 백두대간 v-힐링 스타트업로드 조성사업 예산 신청     : 2022. 4월

❍ 백두대간 v-힐링 스타트업로드 조성사업 `23년 국비 확정(3억) : 2023. 1월

□ 문제점 및 대책

❍ 문제점 : 해당지역이 군립공원구역으로 군립공원 행정절차 선행 필요

☞ 대책 : 군립공원 조성계획 변경을 통한 사전행정절차 이행

□ 향후 추진계획

❍ 실시설계                                : 2024. 1. ~ 2024. 12월

❍ 군립공원 조성계획변경 협의              : 2024. 6. ~ 12월

❍ 사업 착수 및 준공                       : 2025. 1. ~ 2026. 12월

구 분	공약사업
담당부서	관광진흥과(관광개발담당)
추진진도(%)	60%

20

중산관광지 활성화사업

○ 수려한 자연경관을 보유하고 있는 지리산국립공원의 관문역할을 수행해 온

중산관광지가 시설 노후화, 주변관광지개발, 트렌드변화 등으로 경쟁력

상실과 관광객 감소로 활성화 방안이 필요

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 시천면 중산리 일원

❍ 사 업 비 : 금4,600백만원(균특 2,300, 도비 690, 군비 1,610)

❍ 사 업 량 : 중산관광지 활성화 A=292,515㎡

❍ 사업내용                                          (금액단위: 백만원)

연 도	사업비	사업 추진 내용	비 고
2020	800	·실시설계 및 인허가	완료
2021	800	·생태탐방로 조성 L=1.29㎞	완료
2022	1,000	·물소리 빛광장 조성 A=2800㎡	완료
2023	2,000	·산악체험시설 및 경관조명 설치 등	진행중
2024		·하늘정원, 키즈파크, 입구게이트	진행중

□ 추진사항

❍ 지리산 두류생태탐방로 조성사업 실시설계용역 시행    : 2020. 1월

❍ 중산관광지 지정(변경) 및 조성계획(변경) 수립         : 2020. 2월

❍ 지리산 두류생태탐방로 조성사업 준공                 : 2021. 8월

❍ 중산관광지 물소리 빛광장 조성공사 준공              : 2022. 6월

❍ 중산관광지 공원 및 숲체험시설 실시설계        : 2023. 3월 ~ 11월

❍ 중산관광지 공원 및 숲체험시설 공사 착공                       : 2023. 12월

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 중산관광지 공원 및 숲체험시설 공사 준공                    : 2024. 12월

구 분	공약사업
담당부서	관광진흥과(관광개발담당)
추진진도(%)	30%

21

황매산 관광객 편의안전시설 조성사업

○ 사계절 수려한 자연경관을 가진 황매산의 기존 이용 시설을 원활하게

탐방할 수 있는 인프라를 구축하고 황매산의 특색있는 관광시설 확충

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 차황면 법평리 일원

❍ 사 업 비 : 금3,190백만원(국비)

❍ 사 업 량 : 보도육교 설치 L=161m, B=3m, 보도육교 연결 전망대 2개소 설치, 연결데크로드 설치 L=175m, B=2m

❍ 사업내용                                          (금액단위: 백만원)

연 도	사업비	사업 추진 내용	비 고
2021	474	·지역개발계획 변경	완료
2022		·실시설계용역	완료
2023	740	·전망대 설치 1개소, 보도육교 기초 설치	진행중
2024	1,976	·보도육교, 전망대 1개소, 연결데크로드 설치	예정

□ 추진사항

❍ 지역개발계획 변경 수요 조사서 제출              : 2021.  5월

❍ 지역개발계획 변경 관련 현장확인(국토부,경남도 등)  : 2021.  9월

❍ 관계기관 협의 및 관련법 검토 등                : 2021. 10. ~ 12월

❍ 지역개발계획 변경 승인                         : 2021. 12월

❍ 실시설계 및 인허가 협의                        : 2022. 10. ~ 12월

❍ 황매산 관광객 편의안전시설 조성사업 착공           : 2022. 12월

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 황매산 관광객 편의안전시설 조성사업 준공           : 2024. 12월

구 분	공약사업
담당부서	관광진흥과(관광마케팅담당)
추진진도(%)	40%

22

남사예담촌 홍보지원 및 관광 활성화

○ 한국에서 가장 아름다운 마을 제1호로 지정된 남사예담촌을 중심으로 한      연계 관광지 통합 홍보로 국내외 관광객 유치 활성화 유도

○ 관광 인프라 확충과 다양한 매체를 통한 차별화된 콘텐츠 개발로     지역경제 및 관광사업 활성화 방안 모색

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 단성면 남사예담촌

❍ 사업기간 : 2022 ~ 2026년

❍ 소요예산 : 금9,150백만원(국비 4,700, 군비 4,450)

(단위:천원)

구분	총사업비	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	9,150	650	2,850	3,150	1,250	1,250
홍보 지원	(군) 3,250	650	650	650	650	650
콘텐츠 개발 및 상품화	(국∙지) 2,400	-	600	600	600	600
관광 인프라 추가 조성	(국) 3,500	-	1,600	1,900	-	-

❍ 사업내용

- 다양한 매체를 통한 차별회돤 산청 관광 홍보 마케팅 추진

- 이색적인 관광 콘텐츠 개발 및 상품화 확대, 관광 인프라 확대 조성

□ 추진사항

❍ 홍보지원

- 옥외매체 홍보(지하철, 터미널, 옥외LED 등) : 13개소 버스광고 52대
- 온라인 홍보채널(SNS) 운영 : 네이버블로그, 인스타그램, 유튜브 등

- 방송프로그램 홍보 : TV조선 노래하는 대한민국, KBS1 동네한 바퀴, FTV예능 피싱캠프 탁탁, 유튜브 채널 콘텐츠 제작(여행에 미치다, 사피엔스 스튜디오)

- 국내외 관광팸투어(13회) 및 각종 박람회 참여(6회)

❍ 콘텐츠 개발 및 상품화

- 전통문화체험 관광프로그램 개발 및 상품화

▪ 프로그램 개발 및 홍보 : 2023. 1. ~ 5월

▪ 프로그램 운영 : 2023. 3. ~ 12월

- 빅데이터와 함께하는 똑똑한 컨설팅 2차 공모 진행

▪ 지역맞춤형 사업 추진지원 최종 컨설팅 완료 : 2023. 12월

- 지역맞춤형 안내표지 컨설팅사업 공모 시행

▪ 남사예담촌 노후 관광안내판 일제 정비 컨설팅 : 2023. 12. ~ 2024. 2월

❍ 남사예담촌 인프라 구축사업

▪ 2023년 지역개발계획사업비 신청 및 확정 : 2022. 4. ~ 9월

▪ 공유재산 심의 및 관리계획 수립 : 2022. 10월

▪ 편입부지 보상협의 : 2023. 1. ~ 2023. 12월

▪ 실시설계용역 및 지역개발사업구역지정 신청 : 2023. 1. ~ 12월

□ 문제점 및 대책

❍ 사업 추진을 위한 국․도비 예산 확보 필요

⇒ 각종 공모사업 신청을 통한 예산 확보 적극 추진

□ 향후 추진계획

❍ 홍보지원

- 옥외매체 홍보(지하철, 터미널, 옥외LED 등) 및 온라인 홍보채널 운영

- 단체 및 소규모 관광객 유치 인센티브 지원 확대 운영

- 드라마 및 인기 방송 프로그램을 통한 온라인 마케팅 홍보

- 국내외 팸투어 및 관광박람회 참가로 대외적인 산청관광이미지 제고

❍ 콘텐츠 개발 및 상품화

- 도보투어 및 한복입기 체험 등 전통문화체험 프로그램 추가 발굴·운영

- 이색 체험 행사 기획 및 연계 관광지 통합 관광프로그램 개발 및 상품화

❍ 남사예담촌 인프라 구축사업

- 남사예담촌 인프라 구축 사업 착공 및 준공 : 2024. 1. ~ 2024. 12월

구 분	공약사업
담당부서	관광진흥과(관광시설담당)
추진진도(%)	70%

23

생초국제조각공원 꽃잔디 확대 조성

○ 꽃잔디 면적 확대 등을 통해 볼거리를 제공하고 주변상권 활성화 및 산청군 관광 이미지 제고에 기여하고자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 생초면 어서리 772번지 일원

❍ 사업기간 : 2022년 ~ 2024년

❍ 사 업 비 : 금600백만원(군비)

❍ 사 업 량 : 꽃잔디 확대 조성 6,000㎡(기존 조성면적 25,000㎡)

❍ 사업내용 : 꽃잔디 확대 조성대상지 잡목제거 및 정지작업
꽃잔디 확대 조성 대상지 토목공사
(수로, 조경석쌓기, 흙콘크리트 포장 등)

꽃잔디 추가 식재(480,000본) 등

□ 추진사항

❍ 2022.  7월 ~ 12월  : 꽃잔디 추가 보식 및 잡초제거

❍ 2023.  3월 ~  6월  : 문화재 시굴조사 실시

❍ 2023.  7월 ~  9월  : 매장문화재 정밀발굴조사 실시

❍ 2023. 10월 ~ 11월  : 부지추가조성(확대 조성대상지 토목공사)

❍ 2023. 10월 ~ 12월  : 꽃잔디 추가식재 및 잡초제거

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 생초국제조각공원 및 둑방길 꽃잔디 식재·보식, 제초작업 및 관리

❍ 공원 내 기타 시설물 설치 및 보수(로프난간 등 부대시설, 조경수 전정 등)

산림녹지과

2023년 하반기 군정 주요업무 평가결과

(산림녹지과)

□ 총    평

❍ ‘군유림 밀원 식물단지 조성’은 다양한 밀원수종 발굴을 통해 지속적인 밀원수림단지를 확대하는 사업으로 정상 추진 중으로 양봉농가의 소득 창출에 기여. ‘백두대간 생태축 복원사업’은 지리산과 웅석봉을 연결하는 생태축을 복원하여 생물다양성 및 민족의 정기성 회복에 기여.

❍ ‘산림신품종 재배단지 조성’은 부가가치가 높은 산림신품종을 활용한 산림생명산업 기반을 조성하고 공공성이 강한 사회적 협동조합 구성으로 일자리 창출과 주민의 소득증대에 기여. ‘둔철 산림생태인프라 구축사업’은 신안면 둔철 지역의 수려한 자연경관을 활용하여 지역 내 산림생태인프라 구축으로 관광명소 조성 및 지역경제 활성화에 기여.

□ 추진상황

구 분	추진실적(건)						비 고
	계	완료	이행후 계속추진	정상 추진	장기 추진	기타
계	4			4
군수공약사업	4			4
주요시책사업

□ 주요성과(공모사업 등)

❍ 군유림 밀원단지 약 10ha 조성으로 양봉농가 소득 창출에 기여

❍ 사계절 개화 수종을 식재하여 연중 채밀할 수 있는 단지 조성

❍ 수목보식 및 야생화 식재, 수국꽃길 조성하여 산림생태환경 구축

□ 향후 추진계획

❍ 공약사업 4건은 현재 예산 확보하여 정상추진

- 군유림 밀원 식물단지 조성 : 2026년 12월 사업완료

- 백두대간 생태축 복원사업 : 2025년 12월 사업완료

- 산림신품종 재배단지 조성 : 2024년 5월 사업완료

- 둔철 산림생태인프라 구축사업 : 2026년 12월 사업완료

구 분	공약사업
담당부서	산림녹지과(산림행정담당)
추진진도(%)	40%

24

군유림 밀원 식물단지 조성

○ 다양한 밀원수종 발굴을 통하여 지속적인 밀원수림단지를 확대 조성하고 양봉농가의 소득 창출에 기여하고자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 관내 군유림

❍ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2026. 12월

❍ 총 소요예산 : 금337.5백만원(국비 168.8, 도비 50, 군비 118.7)

❍ 사 업 량 : 총25ha(매년 5ha씩 조림)/현재까지 10ha조림

❍ 사업내용

- 양봉농가 숙원사업으로 조림사업 추진 시 군유림 밀원수림 조성

- 채밀기간 연장을 위하여 개화시기별 다양한 밀원수종 발굴 및 식재

- 밀원수 선정은 조림적지를 우선 고려하여 꿀 생산 능력이 높은 수종식재

- 조림지 사후관리 사업으로 밀원수 생육환경 개선하여 활착률 재고

□ 추진사항

❍ 2023년 대상지 확정 및 조림 예정지 정리 완료    : 2022. 12월

❍ 사업 대상지 정리                               : 2023. 1. ~ 2월

❍ 밀원수 식재(6ha) 및 사업 정리                   : 2023. 3. ~ 4월

❍ 조림지 사후 관리 추진 및 사업 정리             : 2023. 4. ~ 12월

□ 문제점 및 대책

❍ 대부분 군유림의 고지대에 위치하고 있어 밀원수 조림의 활착 및 사후 관리(풀베기 등)에 따른 조림 성공률이 낮음

=> 입지적 여건에 맞는 밀원 조림 수종을 선택하고 자연환경(가뭄 등)에 따른 조림목 고사 지역에 대해 보식을 실시

=> 사후관리(풀베기 등) 시 조림목의 보호를 위하여 현장 관리 감독 철저

□ 향후 추진계획

❍ 2024년 대상지 확정 및 조림 예정지 정리 완료    : 2023. 12월

❍ 사업 대상지 정리                               : 2024. 1. ~ 2월

❍ 밀원수 식재(5ha) 및 사업 정리                   : 2024. 3. ~ 4월

❍ 조림지 사후 관리 추진 및 사업 정리             : 2024. 4월

구 분	공약사업
담당부서	산림녹지과(산림보호담당)
추진진도(%)	30%

25

백두대간 생태축 복원사업

○ 민족의 영산 지리산과 웅석봉 군립공원을 연결하는 백두대간 생태축의      복원을 통해 생물 다양성 증진 및 민족의 정기성 회복에 기여

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 삼장면 홍계리 산110-3번지 밤머리재 일원

❍ 사 업 비 : 총 5,810백만원(국비 4,067, 도비 523, 군비 1,220)

합 계	2022년	2023년	2024년	2025년(예정)
5,810,075천원	1,249,075천원	2,850,000천원	1,180,000천원	531,000천원

❍ 사 업 량 : 구조물설치 1개소(B=14m, L=50m), 식생기반토 성토, 자생식물 식재 등

❍ 사업내용 : 지리산과 웅석봉 군립공원의 생태계 연계성 회복 및 산림복원

□ 추진사항

❍ 2023. 3월 : 시공단계의 건설사업 관리계획 승인(국토교통부)

❍ 2023. 4월 : 시공업체 계약체결- (주) 한울

❍ 2023. 7월 : 시공업체 하도급 계약 검토

❍ 2023. 11월 : 건설사업관리용역(책임감리) 계약체결-동해종합기술공사(주)

□ 문제점 및 대책

❍ 사면안정성 검토 등 검토 결과에 따른 설계반영 등으로 사업 추진 지연

- 조속한 시일내 검토 완료하여 사업추진에 차질이 없도록 조치 계획

□ 향후 추진계획

❍ 2024. 1월 ~ 12월. 1차분 사업 공정 진행 및 사업비 집행 추진 및 정산

❍ 2024. 2월 전기·통신 시설 용역 계약 및 착수 예정

구 분	공약사업
담당부서	산림녹지과(산촌소득담당)
추진진도(%)	40%

26

산림신품종 재배단지 조성

○ 부가가치가 높은 산림신품종을 활용한 산림생명산업 기반을 조성하고 공공성 강한 사회적협동조합 구성으로 일자리 창출 및 주민 소득 증대

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 단성면 길리 산98-1번지 일원

❍ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2024. 5.

❍ 총 소요예산 : 금2,500백만원(국비)

❍ 사 업 량 : 재배단지 5ha, 관리 및 작업시설 건축 400㎡ 외

❍ 사업내용

- 꾸지뽕 재배단지 조성(포지, 온실 등)

- 관리시설 1동, 작업시설 1동 등

□ 추진사항

❍ 산림신품종재배단지 실시설계 용역                : 2022. 6월

❍ 사회적협동조합 설립준비위원회 개최              : 2022. 7. ~ 9월

❍ 산림신품종재배단지 실시설계 중간용역 보고       : 2022. 9월

❍ 산청틔움사회적협동조합 창립                     : 2022. 10월

❍ 산림신품종재배단지 실시설계 최종 보고           : 2022. 12월

❍ 산림신품종재배단지 공사 계약 및 시행            : 2023. 5월

□ 문제점 및 대책

❍ 해당사항 없음

□ 향후 추진계획

❍ 신품종재배단지 조성사업 입구 도로 확포장 공사 시행 : 2023. 5. ~ 2024. 4월

❍ 신품종재배단지 조성사업 착공 및 준공            : 2023. 10. ~ 2024. 5월

❍ 신품종재배단지 관리 및 운영                     : 2024. 5월

구 분	공약사업
담당부서	산림녹지과(녹지조성담당)
추진진도(%)	60%

27

둔철 산림생태인프라 구축사업

○ 자연경관이 수려한 신안면 둔철 지역 내 산림생태인프라를 구축하여 산림관광명소 조성 및 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 신안면 안봉리 산19-8번지 일원

❍ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2026. 12월

❍ 총 소요예산 : 금2,500백만원(전환 1,000, 도비 300, 군비 1,200)

❍ 사 업 량 : 자생식물원 1개소, 습지생태관찰소 1개소, 둔철정비대 정비, 그라스생태원 조성 1개소, 수국꽃길조성 1.7km 등

❍ 사업내용

- 생태관찰시설 : 자생식물원, 습지생태관찰소 조성 등

- 생태숲보완사업 : 둔철천문대 정비 및 확장, 그라스생태원 조성, 수목보식, 수국꽃길조성 등

□ 추진사항

❍ 사업대상지 현장조사 및 선정	: 2022. 1. ~ 6월

❍ 경상남도 산림휴양과 업무 협의	: 2022. 12월

❍ 수국꽃길 조성	: 2023.  4월

❍ 둔철생태숲 내 야생화동산 조성 및 천문대정비 완료	: 2023. 10월

□ 문제점 및 대책

❍ 지방전환 사업비로 전환사업 신청 시 반영 요청

□ 향후 추진계획

❍ 지방전환 사업비 추가 확보 건의	: 2024. 5월

❍ 2024년 산림생태인프라 구축사업 시행	: 2024. 1월 ~ 12월

환경위생과

2023년 하반기 군정 주요업무 평가결과

(환경위생과)

□ 총    평

❍ 2050 탄소중립을 위한 탄소중립·녹색성장 기본계획 수립 용역 시행,

전기차 충전시설 설치로 전기차 충전 인프라 확충, 운행차배출가스

저감사업으로 대기환경 개선에 기여하였으며

❍ 재활용 동네마당 확대로 쓰레기 분리수거 및 쾌적한 거리 조성, 공중화장실 개선 및 설치를 통해 이용객들의 편의를 도모하였음

❍ 또한 위생업소 환경개선으로 군민 및 방문객들에게 청정 산청 이미지를 제고하는데 기여하였음

□ 추진상황

구 분	추진실적(건)						비 고
	계	완료	이행후 계속추진	정상 추진	장기 추진	기타
계	1			1
군수공약사업	1			1
주요시책사업

□ 주요성과(공모사업 등)

❍ 탄소중립·녹색성장 기본계획 수립용역   : 88백만원

❍ 전기차 충전시설 설치 사업             : 217대, 2,880백만원

❍ 운행차배출가스 저감사업               : 420대, 665백만원

❍ 슬레이트 처리지원사업                 : 285동, 1,212백만원

❍ 재활용 동네마당 설치사업              : 28개소, 402백만원

❍ 공중화장실 설치사업                   : 4개소, 420백만원

❍ 일반음식점 시설개선 지원사업          : 45개소, 120백만원

□ 향후 추진계획

❍ 민물고기 먹거리타운 홍보 전광판 설치·운영으로 민물고기 산청맛집 홍보

❍ 대기환경 개선을 위한 전기차 보급 및 운행차 배출가스 저감사업 계속 추진

❍ 깨끗한 마을 환경 조성을 위한 재활용 동네마당 설치사업 계속 추진

구 분	공약사업
담당부서	환경위생과(환경보전담당)
추진진도(%)	30%(정상추진)

28

생초 민물 먹거리타운 명품화 사업 지원 사업

○ 생초면 민물고기 먹거리타운 홍보를 위한 홍보 전광판을 설치하여

우리군의 민물음식 맛집을 알리고 관광객 유치에 기여

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 생초면 어서리 287-2일대

❍ 사 업 비 : 금100백만원(군비)

❍ 사 업 량 : 홍보 전광판 설치

❍ 사업내용 : 민물고기 먹거리타운 홍보 전광판 설치(생초버스터미널 인근)

□ 추진사항

❍ 2023. 11월 : 홍보 전광판 디자인 및 설치 위치 선정

❍ 2023. 11월 : 홍보 전광판 설치사업 계약

❍ 2023. 12월 : 문화재(생초고분군) 보존 영향 검토 신청

❍ 2023. 12월 ~ 2024. 1월 : 홍보 전광판 설치사업 추진

□ 문제점 및 대책

❍ 동절기 및 문화재 심의 일정 등으로 공사 중단

➡ 동절기 해제 후 사업 재개

□ 향후 추진계획

❍ 2024. 1월 : 공작물 축조신고 및 옥외광고물 신고

❍ 2024. 2월 ~ 3월 : 홍보 전광판 제작 및 설치

❍ 2024. 4월 : 홍보 전광판 운영

지 역 발 전 과

2023년 하반기 군정 주요업무 평가결과

(지역발전과)

□ 총    평

❍ 지역발전과는 5건의 군수공약사업과 1건의 주요시책사업을 추진 중이며, 행정절차 지연 및 민원 발생 등으로 사업 추진에 어려움은 있으나,

❍ 농림축산식품부 주관 공모사업 선정으로 우리군의 재정확충에 기여, 유해시설 정비를 통한 군민의 정주환경 개선에 앞장서고 있음.

□ 추진상황

구 분	추진실적(건)						비 고
	계	완료	이행후 계속추진	정상 추진	장기 추진	기타
계	6			5	1
군수공약사업	5			4	1
주요시책사업	1			1

□ 주요성과(공모사업 등)

❍ 군수공약사업 및 주요시책사업 정상추진 중

❍ 「신등면 모례지구 농촌공간정비사업」 추진으로 축사 4개소 중 2개소 보상완료

□ 반    성

❍ [도시재생 뉴딜사업(옥산지구)] 도시재생분야 예산축소로 공모 선정 지구 감소와 옥산지구 특화재생 분야 발굴 미흡에 따른 공모 미선정

□ 향후 추진계획

❍ [도시재생 뉴딜사업(옥산지구)] 특화재생 분야 발굴 및 국비 예산 확보를 위한 다양한 노력 경주를 통한 공모사업 추진

❍ 2024년 준공예정인 일반농산어촌개발사업 시설물 감독 및 인수 철저

- 산청읍: 산엔청 건강누리센터, 신안면: 신안 어울림문화센터 등

구 분	공약사업
담당부서	지역발전과(도시재생담당)
추진진도(%)	10%

29

도시재생 사업(옥산지구)

○ 낡고 쇠퇴한 원도심의 주거 안정과 새로운 성장동력 확보

○ 주거환경 정비사업 외 도시를 재활성화 시켜 경쟁력을 높이는 도시혁신사업으로 추진

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 산청읍 옥산리·지리 일원

❍ 사업기간 : 2025 ~ 2028년

❍ 총 소요예산 : 금17,500백만원(국비 10,500, 도비 1,400, 군비 5,600)

❍ 사 업 량

- 산청시장 골목상권 활성화 및 약선생활문화 육성·지원

- 주거환경 개선 및 골목 정비, 주민 소득증대 사업 추진

□ 추진사항

❍ 2022년 공모사업 추진(미선정)                  : 2022. 12월

❍ 용역 입찰 공고                               : 2024.  1월

□ 문제점 및 대책

❍ 정부 정책 및 여건 변화에 따른 공모사업 대상 선정 및 예산 규모 축소

❍ 정부 변경 지침(방재계획 수립 필수)에 따른 2024년 공모 추진

□ 향후 추진계획

❍ 도시재생활성화계획 수립 용역 사업자 선정    : 2024.   2월

❍ 2024년도 공모사업 신청                      : 2024.   9월

❍ 공모사업 결정                               : 2024.  12월

구 분	공약사업
담당부서	지역발전과(주택담당)
추진진도(%)	80%

30

대형아파트 유치

○ 도시의 난개발 방지와 체계적인 도시개발을 통한 쾌적한 정주환경 조성

○ 기반시설 확충으로 주민의 삶의 질 향상 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 신안면 하정리 754-1번지 일원

❍ 사 업 비 : 금18,900백만원(LH 11,200, 군7,700)

❍ 사 업 량 : 공공임대주택 및 면사무소 신축 1식

❍ 사업내용

- 공공임대주택 : 1동(지하1층, 지상12층), 82세대, 연면적 6,005.78㎡

- 신안면사무소 : 1동(지상 3층), 연면적 993.87㎡

□ 추진사항

❍ 2019.  6월 : 국토교통부 공모사업 선정

❍ 2020. 12월 : 사업계획승인

❍ 2021.  7월 : 공사 착공

□ 문제점 및 대책

❍ 공공임대주택 건립 및 면사무소 재건축에 따른 주차 부족 예상

❍ 농촌중심지 활성화사업과 연계하여 주차장 확보 계획

□ 향후 추진계획

❍ 공동주택(공공임대주택) 준공 및 입주                   : 2024.  2월

❍ 공공청사(신안면사무소) 준공                           : 2024.  5월

구 분	공약사업
담당부서	지역발전과(농촌개발담당)
추진진도(%)	30%

31

농산어촌 주거플랫폼 사업

○ 모든 세대를 고려한 계층별 맞춤형 활동기반 구축으로 정주여건을

개선하고 중심지와 배후마을 간 문화복지 서비스 전달체계 구축

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 신안면 소재지 내

❍ 총 소요예산 : 금16,000백만원(국비 11,200, 도비 1,440, 군비 3,360)

❍ 사업내용 : 어울림문화센터 조성(2,268㎡/3층) 및 청소년 문화의 집 조성

배후마을 공동이용시설, 원지 어울림마당, 보행 및 교통환경 개선

❍ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2024. 12월

□ 추진사항

❍ 기본계획 수립 착수                          : 2020.  5월

❍ 기본계획 수립 완료                          : 2022.  2월

❍ 시행계획 수립 착수                          : 2022.  7월

❍ 시행계획 수립 완료                          : 2023.  7월

□ 문제점 및 대책

❍ 정상추진 중

□ 향후 추진계획

❍ 공사 착수                                   : 2023. 11월

❍ 공사 완료                                   : 2024. 12월

구 분	공약사업
담당부서	지역발전과(농촌개발담당)
추진진도(%)	10%

32

농촌공간(모례지역 돈사철거) 정비사업

○ 악취문제로 민원이 지속적으로 제기되고 있는 지구의 유해시설을

정비하고 공간을 활용함으로써 정주여건을 개선하고 지역발전을 도모

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 신등면 모례리 95번지 일원

❍ 총 소요예산 : 금25,000백만원(국비 12,500, 도비 3,750, 군비 8,750)

❍ 사업내용 : 돈사 및 축사철거 4개소(용호농장, 삼현목장, 철원농장, 광남농장)

귀농·귀촌 임대주택 등 주거단지 조성 및 경관인프라 조성

❍ 사업기간 : 2022. 6. ~ 2026. 12월

□ 추진사항

❍ 공모사업 선정                               : 2022.  6월

❍ 주민위원회 구성 및 한국농어촌공사 협약 체결 : 2022. 10월

❍ 기본계획 수립 착수                          : 2023.  1월

❍ 축사 보상 완료(용호농장, 삼현목장)           : 2023.  7월

□ 문제점 및 대책

❍ 연차별 예산 확보로 인해 일괄보상이 어려워 2023년도 2개소(용호농장,

삼현목장), 2024년도에 2개소(철원농장, 광남농장) 보상 집행 계획임

□ 향후 추진계획

❍ 기본계획 수립 완료                        : 2024.  1월

❍ 시행계획 수립                             : 2024.  2월 ~ 2025. 2월

❍ 공사 착수                                 : 2025.  3월

❍ 공사 완료                                 : 2026. 12월

구 분	공약사업
담당부서	지역발전과(농촌개발담당)
추진진도(%)	10%

33

어린이 놀이마당 조성

○ 소재지 내 다목적 휴게 및 여가 공간을 마련하고 어린이 놀이마당을

조성함으로써 주민 편의를 증진하고자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 시천면 사리 일원

❍ 총 소요예산 : 금400백만원(국비 280, 도비 36, 군비 84)

❍ 사업내용 : 부지조성 및 주차공간 정비, 휴게시설물 및 조경 식재

어린이 놀이마당 조성

❍ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2025. 12월

□ 추진사항

❍ 기본계획 수립 착수                          : 2022.  7월

❍ 의견수렴을 위한 주민토론회 개최             : 2022.  9월

❍ 기본계획 수립 완료                          : 2023.  8월

❍ 시행계획 수립 착수                          : 2023. 12월

□ 문제점 및 대책

❍ 시천면 농촌중심지활성화사업 내 포함된 사업으로 시행계획 수립 등 절차이행에 따른 시일이 소요됨에 따라 사업착수 지연

□ 향후 추진계획

❍ 시행계획 수립 완료                          : 2024. 12월

❍ 공사 착수                                   : 2025.  1월

❍ 공사 완료                                   : 2025. 12월

구 분	시책사업
담당부서	지역발전과(농촌개발담당)
추진진도(%)	10%

34

매촌지구 택지개발로 대형아파트 유치

○ 도시기반구역 확충과 귀농·귀촌자들에게 안정적인 택지를 공급

함으로써 인구유입 증대를 기대하고 부동산 가격 안정화에 기여

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 금서면 매촌리 615-1번지 일원

❍ 사 업 비 : 금18,000백만원(군비)

❍ 사업내용 : 대지조성 A=75,838㎡(계획인구 770명/단독46세대, 공동350세대)

❍ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2027. 12월

□ 추진사항

❍ 도시개발구역지정 및 실시설계용역 착수       : 2020.  4월

❍ 경상남도 경관위원회 심의 완료               : 2022.  6월

❍ 경상남도 도시계획위원회 심의 완료           : 2023.  2월

❍ 도시개발구역 지정 및 개발계획 수립 고시     : 2023.  5월

□ 문제점 및 대책

❍ 도시개발구역 지정 및 실시계획인가 등 행정절차 이행에 따른 사업착수 지연

□ 향후 추진계획

❍ 실시설계 완료 및 실시계획 인가              : 2024. 10월

❍ 공사 착수                                   : 2025.  1월

❍ 공사 완료                                   : 2027. 12월

경 제 교 통 과

2023년 하반기 군정 주요업무 평가결과

(경제교통과)

□ 총    평

❍ 경제교통과에서 추진중인 공약사업 7건은 전반적으로 정상 추진되고 있으며, 매년 연차적으로 사업추진이 진행됨에 따라 그 성과를 지속적으로 나타내고 있음

□ 추진상황

구 분	추진실적(건)						비 고
	계	완료	이행후 계속추진	정상 추진	장기 추진	기타
계	7			5	2
군수공약사업	7			5	2
주요시책사업

□ 주요성과(공모사업 등)

❍ 전국 최초 기초자치단체 협력 지역사랑상품권 공동 발행
→ 산청-진주 상생상품권 2억원 공동 발행

❍ 도 교통행정평가 ‘우수’기관 선정 → 특별조정교부금 1억원 확보

❍ 브라보 한방택시 운영 확대와 개선의 재원 확보(국비 224백만원, 도비 112백만원)

❍ 읍면 소재지권 주차난 해소를 위해 시행중인 산청시장 주변 공영주차장 조성사업은 2024년 준공을 목표로 현재 40% 공정률로 사업을 시행중임

❍ 단계시장 활성화 방안 추진을 위해 시행중인 단계시장 장옥 및 주차장 조성사업은 현재 40%공정률로 금년 내 마무리 할 예정이며, 2023년 전통시장 경영환경 개선사업 대상으로 선정됨

□ 반    성

❍ 공약사업의 대부분이 많은 재원 확보, 복잡한 사전 행정절차 이행 등이 필요한 사업으로 조기 추진 및 성과 도출이 일부 미흡함

□ 향후 추진계획

❍ 행정력을 집중하여 사전 행정절차 조기 이행 및 성과 도출 추진

구 분	공약사업
담당부서	경제교통과(교통정책담당)
추진진도(%)	40%

35

읍면 소재지권 주차난 해소(주차장 확보)

○ 읍면 소재지권 주차난 해소(주차장 확보)를 위한 주차장 확충으로
군민의 불편 해소 및 교통복지 서비스 확대

□ 사업개요

❍ 위    치 : 읍·면 소재지 일원

❍ 사 업 비 : 8,668백만원

❍ 사 업 량 : 공영주차장 조성

❍ 단기사업                                         (금액단위 : 백만원)

사업명	사업비	사업내용
산청시장 주변 공영주차장 조성사업	4,768	A=4,460㎡, 88면
산청읍 공공기관 주변 공영주차장 조성사업	2,000	A=940㎡, 23면
단성 성내마을 주차장 조성사업	1,000	A=1,290㎡, 29면
신안면사무소 주변 공영주차장 조성사업	900	A=940㎡, 23면

❍ 장기사업
- 중앙부처 및 도의 공모사업 신청을 통해 국도비를 확보하여 소재지권    공영주차장 확충 방안 강구
- 타 부서와의 긴밀한 협조체계 구축 및 공공사업 추진과 연계하여    주차시설 확충(예: 건설과-다목적광장 조성, 지역발전과-주차장조성)

□ 추진사항

❍ 2021. 1월 : 지방재정투자심사 심의

❍ 2021. 2월 : 공유재산 관리계획 심의

❍ 2023. 3월 : 토지소유자 및 토지세입자 보상 협의 및 보상 완료

❍ 2023. 6월 : 지장물 철거 및 폐기물 처리 용역 등 사전절차 완료

❍ 2023. 9월 : 산청시장 주변 공영주차장 조성사업 시행

□ 문제점 및 대책

❍ 읍면 소재지권의 주차장 대상지 선정 애로와 많은 사업비 투입이 예상됨 → 중앙 및 도 공모사업 등을 통해 사업비 확보

□ 향후 추진계획

❍ 중앙정부와 도의 공모사업 신청을 통한 재정 확보, 타 부서에서 추진
하는 공공사업 등과 연계하여 주차장 확충률 제고

구 분	공약사업
담당부서	경제교통과(일자리창출담당)
추진진도(%)	30%

36

사회적기업 및 마을기업 창업지원

○ 우리군의 지역자원을 활용하면서 일자리 등 사회문제를 해결하는 (예비)사회적기업 및 마을기업 육성을 위하여 창업 비용의 일부를 지원

□ 사업개요

❍ 사업대상 : 산청군 관내 소재 (예비)사회적기업, 마을기업

❍ 사 업 비 : 금270백만원(군비) ※ 2024년 60백만원

❍ 사 업 량 : 총 6개소(연간 2개소×3개년)

❍ 사업기간 : 2023 ~ 2025년(3년간)

❍ 사업내용 : 창업시 소요되는 비용 중 30백만원 범위내 지원

- 리모델링비, 사업개발비, 홍보비, 재료비, 포장박스비, 교육훈련비 등

❍ 지원절차 : 모집공고 → 접수 → 위원회 심의·선정 → 사업시행 → 정산

□ 추진사항

❍ 2022. 7월 : 계획수립[3개년 사업]

❍ 2023. 2월 : 2023년 사업대상 모집공고

❍ 2023. 3월 : 2023년 사업대상 선정 및 시행(사회적기업 2개소)

※ 사회적기업 2개소: 엔티코리아, 신풍영농조합법인

❍ 2023. 6월 : 2023년 사업완료에 따른 보조금 정산

□ 문제점 및 대책

❍ 기존 업종 및 분야와 중복되지 않는 새로운 기업 발굴 애로

❍ 지역경제 일자리 창출로 연계되도록 활용방안 강구 필요함

□ 향후 추진계획

❍ 2024. 1월 : 2024년 사업대상 모집공고

❍ 2024. 2월 : 2024년 사업대상 선정 및 시행

※ 사회적기업 및 마을기업 3개소(개소당 20백만원)

구 분	공약사업
담당부서	경제교통과(지역경제담당)
추진진도(%)	70%

37

전통시장 활성화 및 경제 플랫폼 구축

○ 장보기, 라이브커머스 행사 등의 경제 플랫폼 구축을 통해 경기침체로 약화된 전통시장을 활성화하여 지역경제 발전에 기여하고자 함.

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 전통시장 일원

❍ 총 소요예산 : 금480백만원 ※ 2024년 금118백만원(도비 10, 군비 108)

❍ 사 업 량 : 산청군 전통시장 6개소

❍ 사업기간 : 2022 ~ 2026년(4년간)

❍ 사업내용 : 전통시장 소비촉진 도모 행사(장보기 행사, 온누리상품권 환급,
소비촉진 이벤트 등)

□ 추진사항

❍ 2023. 1월 : 설날 장보기 행사, 명절 온누리상품권 환급행사

❍ 2023. 3월 : 봄철 온누리상품권 환급행사

❍ 2023. 5월 : 모바일 산청사랑상품권 경품행사(1차)

❍ 2023. 5월 : 전통시장 장날 공연행사 및 라이브커머스 추진

❍ 2023. 6월 : 전통시장 온누리상품권 환급행사

❍ 2023. 8.~9월 : 모바일 산청사랑상품권 경품행사(2,3차)

❍ 2023. 9월 : 추석 장보기 행사, 명절 온누리상품권 환급행사

□ 문제점 및 대책

❍ 대형 마트 등의 영향으로 어려운 전통시장의 활성화를 위한 다양한 행사(환급, 경품 등) 필요

□ 향후 추진계획

❍ 2024. 2월~ : 명절 장보기 행사, 명절 온누리상품권 환급행사, 전통시장 장날 공연행사 및 라이브커머스 추진, 모바일 산청사랑상품권 경품행사추진 등

구 분	공약사업
담당부서	경제교통과(교통정책담당)
추진진도(%)	80%

38

브라보 한방택시 운영 확대와 개선

개선차장 확보)

○ 브라보 한방택시 운행 대상마을 선정기준을 완화하여 마을주민의

이동권 보장을 확대하고 교통복지 증진 및 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

❍ 대상마을 : 전읍면 73개 마을(농어촌버스 미운행 마을)

❍ 운행구간 : 마을회관 ~ 생활권 소재지

❍ 사 업 비 : 연간 520백만원(국비 260, 도비 130, 군비 130)

❍ 사업내용 : 개인별 배부된 이용권으로 한방택시 이용

□ 추진사항

❍ 2015.  1월 : 브라보 한방택시 최초 시행

❍ 2018.  9월 : 8개면 46개 마을 추진

❍ 2019.  7월 : 10개면 62개 마을 확대 추진

❍ 2021.  3월 : 임산부 한방택시 시행(인구정책사업 일환)

❍ 2022. 12월 : 브라보 한방택시 관련 시행규칙 개정으로 한방택시 운행 대상마을 선정기준 조정(마을회관에서 버스 승강장까지 거리를 1㎞이상에서 0.7㎞ 이상으로 개정하여 대상마을 선정기준 완화)

❍ 2023. 1.~12월 : 신규 6개마을 추가 승인

□ 문제점 및 대책

❍ 국·도비 감축 편성으로 예산확보 애로 → 군비 추가 편성 필요

□ 향후 추진계획

❍ 브라보 한방택시 운영 확대를 위해 대상마을 선정기준 완화 지속적 홍보

구 분	공약사업
담당부서	경제교통과(일자리창출담당)
추진진도(%)	30%

39

지역특화 마을기업 신활력 일자리 육성

○ 대한민국 대표 우수 마을기업 모델링을 통한 지원으로 지역 자원을       활용한 수익사업으로 주민 소득과 일자리를 창출에 기여하고자 함

□ 사업개요

❍ 사업대상 : 경상남도, 행정안전부에서 지정한 마을기업(5개소)

❍ 총 소요예산 : 금150백만원(군비) ※ 2024년 50백만원

❍ 사 업 량 : 총 6개소(연간 2개소 × 3개년)

❍ 사업기간 : 2023 ~ 2025년(3년간)

❍ 사업내용 : 25백만원 × 2개소

- (인건비) 1인당 연 2,400만원(월 200만원 한도, 자부담 10%이상) 지원

❍ 지원절차 : 모집공고 → 접수 → 위원회 심의·선정 → 사업시행

□ 추진사항

❍ 2022. 7월 : 계획수립[3개년 사업]

❍ 2023. 2월 : 2023년 사업대상 모집공고

❍ 2023. 3월 : 2023년 사업대상 선정 및 시행(마을기업 2개소)

※ 마을기업 2개소 : 지리산대포마을영농조합법인, 농업회사법인 민들레푸드

□ 문제점 및 대책

❍ 기존 업종 및 분야와 중복되지 않는 새로운 마을기업 발굴 애로

❍ 영세한 소규모 마을기업으로 인력 채용에 어려움이 많음

□ 향후 추진계획

❍ 2024. 1월 : 2024년 사업대상 모집공고

❍ 2024. 2월 : 2024년 사업대상 선정 및 시행(마을기업 2개소)

구 분	공약사업
담당부서	경제교통과(지역경제담당)
추진진도(%)	40%

40

단계시장 활성화 방안 마련

○ 안전하고 쾌적한 시장환경 조성으로 이용객이 편리하게 접근할 수

있도록 함으로써 단계시장의 활성화 및 지역경제 발전 도모

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 신등면 단계시장 일원

❍ 총 소요예산 : 금2,641백만원(도비 576, 군비 2,065)

- 시설 현대화사업 : 960백만원(도비 576, 군비 384)

- 주차장 조성사업 등 : 1,681백만원(군비)

❍ 사업기간 : 2022 ~ 2026(4년간)

❍ 사업내용 : 시설현대화사업(장옥 정비), 주차장 조성사업(A = 2,350㎡)
단계시장 활성화 사업(장보기, 페이백 행사 등)

□ 추진사항

❍ 2022. 11월 : 사업대상지 확정(경남도)

❍ 2023. 1. ~ 9월 : 상인회 협의 및 의겸수렴

❍ 2023. 10월 : 주차장조성사업, 장옥 신축공사 실시설계 용역

❍ 2023. 12월 : 주차장 조성사업 착공

□ 문제점 및 대책

❍ 기존 장옥 철거 시 조성될 임시 장옥 이전으로 준공 완료 시까지 상인들의 사용 불편이 우려되므로 철거 후 신속한 공사가 진행되어야 함

□ 향후 추진계획

❍ 2024. 2월 : 장옥 철거 대비 임시장옥 설치․운영

❍ 2024. 3월 : 장옥 철거공사, 폐기물 처리, 장옥 신축공사 착공 등

❍ 2024. 6월 : 장옥 신축공사 및 주차장 조성사업 준공, 점포 입주,
임시장옥 철거 등

구 분	공약사업
담당부서	경제교통과(지역경제담당)
추진진도(%)	20%

41

산청시장 주상복합 신축

○ 「산청시장 주상복합 신축」사업 추진으로 노후화되고 경쟁력이 약화된 산청시장의 지역상권 활성화 및 부족한 주거 공간 확보

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 산청읍 옥산리 산청시장 일원

❍ 사업기간 : 2022. 9월 ~

❍ 총 소요예산 : 금111,846백만원

※ 총사업비 미정(타당성 조사용역 시 산출 사업비)

❍ 사업내용 : 산청시장 주상복합 신축사업

□ 추진사항

❍ 2022.  7월 : 추진계획 수립

❍ 2022.  9월 : 타당성 조사 용역 시행

❍ 2022. 10월 : 추진위원회 구성

❍ 2023.  3월 : 타당성 조사 용역 과업기간 변경

❍ 2023.  4월 : 타당성 조사 용역 중간보고

❍ 2023.  7월 : 타당성 조사 용역 최종 보고회

□ 문제점 및 대책

❍ 보상금, 건축비 등 사업비 과다 예상, 사업 시행방안 검토 필요
→ 민간투자, 국·도비 등 재원 조달 방안 모색

❍ 건축물, 토지 등 100명 이상의 소유자가 있으나 건축물대장, 등기사항증명서 등 공부 정리가 되어있지 않아 보상 등 향후 사업 추진이 어려움
→ 정비용역 시행으로 실소유자 확인 등 공부 정리 진행

□ 향후 추진계획

❍ 2024. 1월~ : 추진방향 설정 및 재원 조달 방안 모색

❍ 2024. 1월~ : 공부 정리 용역 시행

안전총괄과

2023년 하반기 군정 주요업무 평가결과

(안전총괄과)

□ 총    평

❍ 무선인터넷 설치를 통한 주요 관광지 및 다중이용시설 이용객 편의 증대

❍ CCTV 설치 및 교체를 통한 범죄 예방 기여

❍ 취락마을 방송용 스피커 설치를 통한 각종 재난으로부터 주민들을 보호할 수 있는 환경 조성

□ 추진상황

구 분	추진실적(건)						비 고
	계	완료	이행후 계속추진	정상 추진	장기 추진	기타
계	3	1		2
군수공약사업	3	1		2
주요시책사업

□ 주요성과(공모사업 등)

❍ 엑스포 행사장 내 무선인터넷 설치를 통한 엑스포 행사 방문객들 편의 증대에 기여

❍ 신규 CCTV 설치 및 노후 CCTV 교체를 통한 범죄 예방 및 신속한 검거 기여

❍ 취락마을 방송용 스피커 설치를 통한 집중호우 등 각종 재난으로부터 주민을 보호할 수 있는 환경 조성 및 재난 상황등 신속한 전파를 통한 재난 선제적 대응 및 인명피해 예방

□ 향후 추진계획

❍ 방범CCTV 추가 설치를 통한 각종 범죄 예방

❍ 연차별 가정용무선방송장치 구축을 통한 재난 선제적 대응 및 인명피해 예방

구 분	공약사업
담당부서	안전총괄과(관제통신담당)
추진진도(%)	100%

42

무선 공공 인터넷망 구축사업

○ 동의보감촌 등 산청군 주요 관광지 및 다중이용시설에 무선 인터넷 서비스망을 구축하여 지역주민과 관광객들에게 편의 제공

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 내 주요 관광지 및 다중이용시설

❍ 총 소요예산 : 금120백만원(군비)

❍ 사업기간 : 2022. 10. ~ 2023. 9.

❍ 사 업 량 : 동의보감촌 내 10개소

❍ 사업내용 : 사업 목적에 부합하는 주요 관광지를 선정하여 무선인터넷 연결장치	(AP) 등 인프라 구축 및 운영, 안내표지판 설치, 유지·보수 등 실시

□ 추진사항

❍ 엑스포 행사장 내 위치선정 및 현장조사       : 2023. 5월

❍ 세부사항 설계                               : 2023. 6월

❍ 사업추진 완료                               : 2023. 9월

□ 문제점 및 대책

❍ 공공와이파이 특성상 누구나 이용할 수 있으므로, 한꺼번에 많은 사용자가

접속할 경우 속도가 느려지고, 잦은 끊김이 생겨 사용자들의	불만 발생

→ 동의보감촌내 관광객 밀집구역에 무선 인터넷망 신설 및 이설 완료

구 분	공약사업
담당부서	안전총괄과(관제통신담당)
추진진도(%)	80%

43

방범CCTV 설치사업

○ 농축산물 도난 등 지역에서 발생하는 각종 범죄 예방과 신속한 검거를      위하여 방범CCTV를 설치하고자 함.

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 단성면 성내리 외 64개소

※ 범죄 해결 및 예방효과 극대화 할 수 있는 장소 우선 설치

❍ 사업기간 : 2022. 10. ~ 2026. 10월

❍ 총 소요예산 : 금1,583백만원

❍ 사업내용

- 신규 카메라 및 노후 카메라 교체

- 전용회선 및 자가망을 구성하여 관제센터와 연계

□ 추진사항

❍ 지능형CCTV 신규 4개소 4대             : 2024. 3 ~ 6월

❍ 노후 지능형 CCTV 교체 40개소 40대     : 2024. 3 ~ 6월

❍ 생활방범 신규 21개소 21대               : 2024. 3 ~ 6월

□ 문제점 및 대책

❍ 해당사항 없음

구 분	공약사업
담당부서	안전총괄과(자연재난담당)
추진진도(%)	25%

44

취락마을 방송용 스피커 설치

○ 집중호우 등 각종 재난으로부터 주민을 보호할 수 있는 환경 조성으로, 재난상황 등 신속한 전파를 통한 재난 선제적 대응 및 인명피해 예방

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 관내 취락마을 일원

❍ 사업기간 : 2023 ~ 2026년

❍ 사 업 비 : 800백만원(군비 800백만원)

❍ 사 업 량 : 40여개 취락마을 방송장비 설치 1식

- 40개마을 X 20백만원 = 800백만원

❍ 사업내용 : 가정용 마을 송□수신기 및 마을방송 송신기 설치

□ 추진사항

❍ 23년도 본예산 편성 요구 및 편성             : 2022.  9월

❍ 계약방법 검토 등 행정절차 이행              : 2023.  3월

❍ 구매계획 및 구축사업 시행                   : 2023. 4. ~ 5월

❍ 2023년 가정용 무선방송장치 구축사업 준공     : 2023.  9월

※ 11개 읍□면, 13개 마을

❍ 2024년도 본예산 편성 요구(200백만원)          : 2023.  9월

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 연차별 가정용 무선방송장치 구축 추진        : 2024. 1. ~ 2026. 12월

건 설 과

2023년 하반기 군정 주요업무 평가결과

(건설과)

□ 총    평

❍ 교차로의 개선 및 국도의 위험구간을 개선하여 주민들의 도로 이용 불편 개선 및 지역간 교통 수요 증가로 관광 활성화 및 지역발전 기대

□ 추진상황

구 분	추진실적(건)						비 고
	계	완료	이행후 계속추진	정상 추진	장기 추진	기타
계	2	1		1
군수공약사업	1			1
주요시책사업	1	1

□ 주요성과(공모사업 등)

❍ 함양~울산간 고속도로 연계(차황~신원)은 도로선형개량 사업은 경상남도 도로관리사업소에서 사업완료하여 고속도로 연계 도로망 구축으로 교통수요 증가 및 지역발전 기대

❍ 원지교차로 개선사업은 원지(중촌)에서 진주 방향으로 원활하게 추진중에 있어 원활한 교통소통에 기대

□ 반    성

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 2025. 1월: 원지(중촌)교차로 개선사업 준공

❍ 행정력을 집중하여 사업준공 조기이행 및 성과 도출 추진

구 분	공약사업
담당부서	건설과(도로담당)
추진진도(%)	40%

45

원지교차로 개선사업

○ 국도3호선 개통 이후 산청군 신안면 중촌리 구간을 이용하는 주민들이 진․출입 램프가 없어 도로를 우회하는 불편을 겪고 있어 교차로 개선이 시급함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 신안면 중촌리 일원

❍ 사 업 비 : 금1,800백만원(국비)

※ 시행처 : 부산지방국토관리청 진주국토관리사무소(산청군 건의사업)

❍ 사 업 량 : 교차로 개선(진주방향) L=320.0m

❍ 사업기간 : 2022 ~ 2025년

□ 추진사항

❍ 국도3호선 산성교차로 개설건의(산청군→국토교통부)     : 2018. 11월

❍ 제6차(2018~2022년) 국도시설개량(병목지점) 사업 반영   : 2019.  4월

❍ 실시설계용역 착수 및 완료                           : 2020.  3월

❍ 사업추진 주민설명회 개최                            : 2020. 11월

❍ 사업착공                                            : 2023.  1월

□ 문제점 및 대책

❍ 편입부지에 대한 보상협의 및 행정절차 추진 시 조기 완료를 위하여 산청군 행정지원 계획

□ 향후 추진계획

❍ 사업준공                                            : 2025.  1월

구 분	시책사업
담당부서	건설과(도로담당)
추진진도(%)	100%

46

함양~울산간 고속도로 도로망 구축

○ 산청군과 거창군 경계를 연결하는 국도59호선의 위험구간 개선을 통해 함양~울산간 고속도로 연계 도로망을 구축하여 지역간 교통 수요 증가로 관광 활성화 및 지역발전 기대

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 차황면 장박리 일원

❍ 사 업 비 : 금3,390백만원(국비)

※ 시행처 : 경상남도 도로관리사업소(산청군 건의사업)

❍ 사 업 량 : 위험도로 선형개선 L=1.32km

❍ 사업기간 : 2022 ~ 2023년

□ 추진사항

❍ 위험도로 개선사업 반영                              : 2019.  4월

❍ 실시설계용역 착수                                   : 2019.  6월

❍ 사업착수(경상남도 도로관리사업소 진주지소)           : 2020.  4월

❍ 편입부지 보상협의 시행                              : 2020. 10월

❍ 사업완료                                            : 2023. 10월

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획 : 완료됨

상 하 수 도 과

2023년 하반기 군정 주요업무 평가결과

(상하수도과)

□ 총    평

❍  각종 민원 및 행정절차 지연 등으로 사업 추진에 어려움이 있으나, 중장기 발전계획 등 미래수요에 적극 대응하기 위해 급수구역 확장 및 안정적인 하수처리 노력으로 상·하수도 보급률 향상

□ 추진상황

구 분	추진실적(건)						비 고
	계	완료	이행후 계속추진	정상 추진	장기 추진	기타
계	2			2
군수공약사업	2			2
주요시책사업

□ 주요성과

□ 수도정비 기본계획(변경) 수립을 통한 지방상수도 공급구역 확장

□ 단성급수구역 지방상수도 확장(신등지구) 완료

□ 주민설명회를 통해 하수처리시설에 대한 이미지 제고 지역주민들의 갈등 완화

□ 석대지구·시천지구·노은지구 하수도 증설사업 실시설계용역 완료

□ 향후 추진계획

[상수도 시설 확충]

□ 2024. 3~4월: 시천급수구역(비상취수원) 착공. 삼장2지구 3차분 준공,

□ 2024.   6월: 비상공급망(신안지구) 준공, 산청생초정수장 착공

□ 2024. 8~12월: 산청생초정수장 감리 착공, 시천정수장 증설 준공

[공공하수처리시설 설치사업]

□ 2024. 6~7월: 석대지구 재원 협의 및 하수도 설치인가 완료, 사업 착수

□ 2025. 10~12월: 시천지구 하수도 증설 사업 준공

구 분	공약사업
담당부서	상하수도과(상수도담당)
추진진도(%)	70%

47

상수도 시설확충

○ 산청군내 지방상수도 미급수지역에 원수 부족 및 수질 불량 등의 문제로지방상수도 수혜지역을 확장하여 안정적이고 깨끗한 상수도 공급

○ 지방상수도 운영중이나 시설정비가 필요한 취⋅정수 시설을 확장 및 개선하여 맑은 물 공급에 능동적으로 대처하고자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 일원

❍ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2025. 12월(Ⅱ단계)

❍ 총 소요예산 : 금86,008백만원(국비 39,428, 도비 30,355, 군비 16,225)

- 단성급수구역 : 19,360백만원

- 시천급수구역 : 10,000백만원

- 삼장지구 인입공사(2공구) : 10,900백만원

- 단성급수구역 비상공급망 구축사업 : 11,348백만원

- 산청·생초 통합정수장 증설 및 지방상수도 확장사업 : 24,400백만원

※ 산청급수구역(오부·금서지구) 준공완료(10,000백만원)

❍ 사업내용

- 정수장증설(시천, 산청・생초), 배수지 설치(삼장), 관로매설 L=120km,        가압장 및 감압변 설치 등

□ 추진사항

❍ 삼장2지구(3차분)  공사 착공                       : 2022.  7월

❍ 단성급수구역 비상공급망(신등지구) 공사 착공       : 2022.  7월

❍ 산청생초지구(산청·생초정수장) 설계용역 착공      : 2022. 11월

❍ 단성정수장증설(5,700톤) 준공                      : 2022. 12월

❍ 단성급수구역 비상공급망(신안지구) 공사 착공       : 2023.  6월

❍ 단성정수장증설(단성·신안지구) 공사 착공          : 2023.  6월

❍ 단성급수구역 비상공급망(신등지구) 준공            : 2023.  8월

❍ 시천급수구역(시천정수장증설) 착공                 : 2023. 10월

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 시천급수구역(전기 및 계측제어) 착공               : 2024.  2월

❍ 시천급수구역(비상취수원) 착공                     : 2024.  3월

❍ 삼장2지구(3차분) 준공                             : 2024.  4월

❍ 단성급수구역 비상공급망(신안지구) 준공            : 2024.  6월
❍ 산청․생초지구(산청․생초 정수장) 착공	: 2024.  6월

❍ 산청․생초지구(산청․생초 정수장) 감리 착공          : 2024.  8월

❍ 시천급수구역(시천정수장증설) 준공                 : 2024. 12월

구 분	공약사업
담당부서	상하수도과(하수도담당)
추진진도(%)	65%

48

공공하수도 수혜지역 확장

○ 공공수역으로 무분별하게 배출되는 생활오수로 인해 하천오염이 심각한      실정이며 남강댐 상류부로서 하천의 주요 오염원인 생활오수를 사전에      차단하여 공공수역의 수질개선에 기여하고자 함.

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 차황면 상법리, 단성면 방목리, 시천면 사리, 생초면 노은리 일원

❍ 사업기간 : 2023 ~ 2026년

❍ 총 소요예산 : 금38,475백만원(국비 26,960, 도비 2,894, 군비 2,918, 기금 5,703)

❍ 사 업 량 : 하수관로 L=24.2km, 배수설비 608가구

하수처리장 증설(신안단성 1,200톤/일, 시천 250톤/일)

❍ 사업내용 : 하수처리시설 신·증설 및 하수관로 매설, 배수설비 등

□ 추진사항

❍ 노은지구 농어촌마을하수도 증설사업 착수          : 2023.  3월

❍ 시천 공공하수처리시설 증설사업 착수              : 2023.  6월

❍ 석대지구 공공하수도 설치인가 및 재원 협의        : 2023.  8월

❍ 상법지구 공공하수도 정비사업 준공                 : 2023. 12월

□ 문제점 및 대책

❍ 해당사항 없음

□ 향후 추진계획

❍ 덕촌마을 하수관로 정비사업 착수                   : 2024.  3월

❍ 덕교, 대포, 월평, 모례지구 공공하수관로 설치사업 착수   : 2024.  6월

❍ 시천지구 농어촌마을하수도 증설사업 완료          : 2024. 12월

❍ 노은지구 농어촌마을하수도 증설사업 완료          : 2025. 12월

❍ 석대지구 농어촌마을하수도 증설사업 완료          : 2026.  6월

❍ 철수지구 하수관로 정비사업 완료                  : 2027.  8월

보 건 정 책 과

2023년 하반기 군정 주요업무 평가결과

(보건정책과)

□ 총    평

❍ 취약지역 공공보건의료서비스 개선을 통한 지역사회에 차별화된 양질의 보건의료서비스 제공

❍ 감염병 발생 시 신속한 대응체계 구축으로 감염병 확산방지 및 군민건강증진 향상에 기여

□ 추진상황

구 분	추진실적(건)						비 고
	계	완료	이행후 계속추진	정상 추진	장기 추진	기타
계	3	2		1
군수공약사업	2	1		1
주요시책사업	1	1

□ 주요성과

❍ 내과 전문의 채용을 통한 진료실시

❍ 권역책임의료기관인 국립경상대학교병원과 업무협약 체결

❍ 매주 1회 국립경상대학교병원 내분비내과 교수진 진료 실시

(24년 진료과 협의 실시: 국립경상대학교병원 정신건강의학과)

❍ 코로나19 진단검사 등 선별진료소 운영: 3,959건 / 연중 상시 운영, 2024. 1월 운영 종료

❍ 코로나19 확진자 관리 및 접촉자 분류: 1,171건

❍ 코로나19 감염취약시설 선제검사: 2,690건 / 23개소 주 1회 실시

❍ 법정감염병 및 신종·해외유입 연중 감시·대응체계 구축 및 운영

□ 반    성

❍ 지속적인 의료 장비 보강을 통한 보건의료서비스 개선 필요

□ 향후 추진계획

❍ 국립경상대학교병원과의 협약기간 및 진료시간 연장 추가 협약

❍ 감염병 발생에 대비한 24시간 감시 및 신고에 따른 즉각적인 대응

구 분	공약사업
담당부서	보건정책과(보건행정담당)
추진진도(%)	100%

49

내과 전문의 채용 추진

○ 산청군보건의료원 진료분야 기능 강화를 위해 내과 전문의를 채용       하여 의료취약지역인 우리 군의 보건의료서비스를 개선하고 보건의료원      운영 활성화를 도모하고자 함

□ 운영 현황

❍ 위    치 : 경남 산청군 산청읍 중앙로 97

❍ 진료과목 : 외과, 소아청소년과, 마취통증의학과(내과), 한방과, 치과, 건강검진, 응급실

❍ 의료진 구성 : 모든 진료과목 공중보건의사 배치(13명)

- 전문의 7명(외과 1, 소아청소년과 1, 마취통증의학과 1, 응급실 4)

- 일반의 1명(건강검진 1)

- 치과의 3명(치과 2, 구강보건 1)

- 한의사 2명(한방과 1, 한의약 증진 1)

□ 추진사항

❍ 2022. 8월 : 지역보건의료사업 업무대행의사(내과 전문의) 채용 계획수립

❍ 2022. 11 ~ 12월 : 업무대행의사(내과 전문의) 채용 공고(1차 ~ 3차)

❍ 2023. 2 ~ 5월 : 업무대행의사(내과 전문의) 채용 공고(4차, 5차)

❍ 2023. 6월 : 업무대행의사(내과 전문의) 진료 실시

□ 문제점 및 대책

❍ 원활한 내과 진료가 가능하도록 의료장비 보강 등을 통한 진료환경조성

□ 향후 추진계획

❍ 진료서비스 개선을 위한 의료장비 보강(내시경 등)

구 분	시책사업
담당부서	보건정책과(보건행정담당)
추진진도(%)	100%

50

대학병원급 의료기관과의 업무협약 체결

○ 산청군보건의료원의 공공보건의료기관으로서의 역할 제고와 지역의료 발전을 위하여 인근 대학병원 의료기관과의 업무협약을 체결코자 함

□ 추진개용

❍ 협 약 명 : 산청군보건의료원과 경상국립대학교병원간 업무협약

❍ 협약기관 : 산청군보건의료원 ⇔ 경상국립대학교병원

❍ 목    적 : 지역의료 발전을 위해 의료인력 교류 및 지원에 관한

업무협약으로 지역주민의 건강증진에 기여하고자 함.

❍ 협약기간 : 협약체결일로부터 1년간, 이후 1년 단위 연장 가능

❍ 협약내용 : 산청군보건의료원 미개설 진료분야에 대한 의료 인력 지원

□ 추진사항

❍ 2022. 10월 : 경상국립대학교병원과 업무협약체결

❍ 2022. 12월 : 매주1회 4시간 경상국립대학교병원 내분비내과 교수진 진료 개시

❍ 2023. 12월 : 매주1회 4시간 경상국립대학교병원 정신건강의학과 교수 진료 개시

□ 문제점 및 대책

❍ 농어촌의료서비스개선사업을 통한 의료장비 보강으로 양질의 의료서비스 제공

□ 향후 추진계획

❍ 협약기간 및 진료시간 연장을 통해 지속적인 지역사회 공공보건의료       서비스 제공

구 분	공약사업
담당부서	보건정책과(예방의약담당) (감염병관리담당)
추진진도(%)	70%

51

감염병 선제적 방역 시스템 확충

○ 감염병 선제적 방역시스템 구축으로 감염병 환자 발생 시 신속한 보고와 조치가 이루어져 상황 종료까지 감염병 예방 및 지역사회 전파 차단에 만전을  기하고자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 관내 일원

❍ 사업기간 : 2022 ~ 2026년

❍ 총 소요예산 : 금4,436백만원

❍ 사업내용

- 코로나19 선별진료소 상시 운영 및 비상방역체계 강화

- 감염병 감시 및 조기발견 체계 강화를 위한 핫라인 구축

- 감염병 재유행 대비 감염병 감시체계 강화

□ 추진사항

❍ 코로나19 선별진료소 운영(연중) 106,270건      : 2022. 6월 ~ 2024. 12월

❍ 감염취약시설 선제검사 23개소 39,732명        : 2022. 6월 ~ 2024. 12월

❍ 감염취약시설 감염병 발생 대응체계 구축 및 관리 : 연중

❍ 주요 법정감염병 연중 감시체계 운영(1~4급)    : 연중

❍ 하절기 방역 비상근무 및 취약지역 친환경 방역소독 : 연중

❍ 해충기피제 보관함 설치 55대(2023 태양광 보관함 신설 6대) : 연중

❍ 해충 포충기 설치 188대(2023년 신설 10대)       : 연중

□ 문제점 및 대책

❍ 주기적 감염병 재유행 대비 지속적 지역사회 감염병 예방 및 관리 필요

□ 향후 추진계획

❍ 코로나19 비상방역체계 유지 및 비상방역대책반 운영  : 코로나19 위기단계 종료 시 까지

❍ 감염취약시설 감염병 발생 대응체계 구축 및 관리 : 연중

❍ 주요 법정감염병 연중 감시체계 운영(1~4급) : 연중

❍ 감염병 대응 교육 및 지역주민 대상 감염병 예방·홍보 : 연중

건강관리과

2023년 하반기 군정 주요업무 평가결과

(건강관리과)

□ 총    평

❍ 인공관절 수술비 지원범위를 확대하여 군민의 경제적 부담을 경감하고

건강하고 활기찬 노후 생활을 지원

□ 추진상황

구 분	추진실적(건)						비 고
	계	완료	이행후 계속추진	정상 추진	장기 추진	기타
계	1			1
군수공약사업	1			1
주요시책사업

□ 주요성과(공모사업 등)

❍ 노인 무릎 인공관절 수술비 등 지원 : 11건(8명)

□ 반    성

❍ 2차 추경(9월경) 시 사업비 15백만원을 추가확보 하였으나 농번기        (9~10월)와 개인사정으로 수술시기 연기로 잔액발생

□ 향후 추진계획

❍ 본예산 편성 시 소요예산 확보로 적기에 수술비 지원

❍ 읍․면 이장회의, 반상회, 현수막 게시 등으로 적극적인 사업 홍보 실시

구 분	공약사업
담당부서	건강관리과(건강지원담당)
추진진도(%)	90%

52

노인 무릎 인공관절 수술비 등 지원 사업

○ 산청군 자체 예산으로 만성 퇴행성관절염으로 고통받는 어르신께 인공관절      수술기회 제공 및 의료비 지원으로 건강하고 활기찬 노후 생활 도모

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 관내 일원

❍ 사 업 비 : 20백만원(군비)

❍ 사 업 량 : 20건

❍ 사업내용

- 산청군에 주소를 둔 만 60세 이상 군민 중 의료급여 수급권자 또는 기준중위소득 100분의 100이하인 신청자의 수술비 중 본인부담금 지원

- 한쪽 무릎 기준 100만원 한도, 양쪽 무릎 기준 200만원 한도로 수술비 등 지원

□ 추진사항

❍ 노인 무릎 인공관절 수술비 등 지원 확대 추진 계획 수립     : 2022. 7월

❍ 2022년 노인 무릎 인공관절 수술비 등 지원 실시             : 2022. 10~12월

❍ 산청군 노인 무릎 인공관절 수술비 등 지원에 관한 조례 제정     : 2022. 12월

❍ 2023년 노인 무릎 인공관절 수술비 등 지원 계획 수립         : 2023. 1월

❍ 2023년 노인 무릎 인공관절 수술비 등 지원 실시              : 2023. 1월

❍ 2023년 노인 무릎 인공관절 수술비 등 지원 추가 예산 확보        : 2023. 9월

❍ 2023년 노인 무릎 인공관절 수술비 등 추가 지원 실시         : 2023. 9~12월

□ 문제점 및 대책

❍ 인공관절 수술 후에는 지원이 되지 않으므로 읍·면 이장회의 등을 통하여 반드시 수술 전에 신청하도록 주민 홍보

□ 향후 추진계획

❍ 읍․면 이장회의, 반상회, 현수막 게시 등으로 적극적인 사업 홍보 실시

농축산과

2023년 하반기 군정 주요업무 평가결과

(농축산과)

□ 총    평

❍ 농업분야 보조금 확대를 통한 농업생산기반시설 확충 및 경쟁력 강화

❍ 친환경인증수수료 지원, 친환경인증농가 장려금 및 유박지원 등으로 친환경농업 인프라 확충

❍ 논 타작물재배 농지 직불금 확대 지급으로 쌀값 안정 및 농가소득 안정화

❍ 청년 농업인, 귀농귀촌자 전문상담 및 융자지원으로 안정적인 농촌정착 지원

□ 추진상황

구 분	추진실적(건)						비 고
	계	완료	이행후 계속추진	정상 추진	장기 추진	기타
계	10		1	8	1
군수공약사업	9		1	7	1
주요시책사업	1			1

□ 주요성과(공모사업 등)

❍ 농업소득증대사업 및 농업발전기금 융자사업 확대 : 667농가 5,586백만원

❍ 친환경인증농가 인증수수료, 장려금, 유박 지원: 1,426농가 614백만원

❍ 논 타작물 재배농가 직불금 확대 지원: 199농가 242백만원

❍ 귀농귀촌 상담 711건, 귀농인의 집 6개소 운영

❍ 귀농귀촌 유치지원사업 공모 선정: 221백만원

❍ 청년농업인 지원 35명 347백만원, 후계농업인 육성자금 지원 19명 5,700백만원

□ 향후 추진계획

❍ 농촌 인력 수급을 위한 농촌인력중개센터 운영 활성화 도모

❍ 귀농귀촌 활성화를 위한 지속적인 상담서비스 제공 등 지원 확대

❍ 쌀값 안정화를 위한 타작물재배농지 직불금 확대 지원

❍ 지역 특산품인 흑돼지 명품화를 위한 우량 모돈 교체사업 등 계속 추진

구 분	공약사업
담당부서	농축산과(농업정책담당)
추진진도(%)	50%(정상추진)

53

농업보조금 확대 지급

○ 안정적인 농특산물 생산 및 신규 고소득작목 개발을 위해 보조사업을

확대시행하여 농가소득증대 도모

□ 사업개요

❍ 위    치: 산청군 관내 일원

❍ 사 업 비: 49,738백만원(당초목표액 47,979백만원)

❍ 사업기간: 2022 ~ 2026년

❍ 세부내역

사업명	총사업비	연차별 사업예산(백만원)
		‘22년	‘23년	‘24년	‘25년	‘26년 이후
계	49,738	6,679	8,781	8,714	13,101	12,463
농업소득증대사업	10,700	1,700	2,000	2,000	2,500	2,500
건조기 및 저온저장고지원사업	5,000	800	800	800	1,300	1,300
고품질쌀 생산지원	6,261	760	985	870	1,823	1,823
벼 병해충 공동방제 농작업 대행료 지원	3,304	384	600	720	800	800
유기질비료지원사업	12,000	2,000	2,500	2,500	2,500	2,500
흑돼지 명품화 사업 지속확대	790	90	85	48	287	280
유기축산 한우단지확대	6,590	640	742	577	2,631	2,000
흑돼지 축제 개최	220	-		60	80	80
축산농가 수분조절재지원사업	2,583	200	594	589	600	600
청년농업인, 귀농귀촌지원사업	2,290	105	475	550	580	580

□ 추진사항

❍ 2023. 10월: 각종 보조사업 예산 편성 및 확보

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 2024. 1 ~ 2월: 사업계획 수립 및 사업대상자 선정

❍ 2024. 3 ~ 11월(가능한 상반기 완료): 사업 추진

❍ 2024. 12월: 사업비 정산

구 분	공약사업
담당부서	농축산과(전원농촌담당)
추진진도(%)	60%(정상추진)

54

청년 농업인, 귀농·귀촌 지원사업 확대

○ 젊고 유능한 인재의 농업 분야 진출을 촉진하는 선순환 체계 구축, 농가

경영주의 고령화 추세 완화 등 농업 인력구조 개선과, 도시민의 귀농귀촌

희망자의 안정적인 농촌정착 및 지역 활력 회복을 위한 지원 사업 확대 추진

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 관내 일원

❍ 사 업 비 : 2,290백만원

❍ 사업내용 : 청년후계농 및 귀농 지원사업 등 각종 융자·보조금을 지원하여  청년·귀농인 안정적인 농촌정착 지원

❍ 사업기간 : 2022 ~ 2026년

□ 추진사항

❍ 귀농귀촌 개인별 전문 상담을 통한 인구유입 추진

- 2022년: 2023년 상담실적(12. 31.기준): 804건

❍ 도시민 유치 귀농귀촌 박람회 참석: 4회

❍ 귀농인의 집 운영지원: 6개소

❍ 2023년 귀농귀촌 유치지원사업 공모 선정으로 사업비 확보: 221백만원

❍ 청년농업인 지원: 영농정착금지원 482백만원(57명), 취농직불지원 60백만원(5명)

❍ 후계농업인 육성지원 : 육성자금배정 4,051백만원(22명)

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 귀농귀촌 상담사 채용을 통한 지속적인 상담서비스 제공

❍ 도시민 유치 귀농귀촌 박람회 및 지역축제 참가: 4회(박람회 3회, 축제 1회)

❍ 2023년도 사업계획 수립 및 대상자 선정 지원

❍ 청년후계농 농지임대료지원 및 청년창업농 맞춤형지원사업 추진

❍ 청년농업인 커뮤니티 활성화지원사업 추진

구 분	공약사업/시책사업
담당부서	농축산과(농업정책담당)
추진진도(%)	100%(이행후계속추진)

55

농촌인력중개센터 운영

○ 농업 분야 특화된 인력수급 지원체계 구축을 통해 농촌인구 감소 및 고령화       등에 따른 농촌 일손 부족 문제 해소

□ 사업개요

❍ 위    치: 농협중앙회 산청군지부

❍ 사 업 비: 117.5백만원

❍ 사업내용: 전담인력배치, 농작업 인력풀 구성 및 인력중개, 농작업자                 보험가입, 현장실습교육, 참여자 숙박·교통비 지원 등

❍ 사업기간 : 2023 ~ 계속

□ 추진사항

❍ 농촌인력중개센터 개소: 2023. 3. 27

❍ 농촌인력중개센터 전담인력 배치: 2명(센터장, 사무장)

❍ 영농작업반 구성: 7개반 138명

❍ 농촌인력 중개: 1,400농가 6,139명 중개

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 2024. 2. : 전담인력 채용(센터장 1명, 업무지원 1명)

❍ 2024. 3. : 인력모집 및 홍보(전단지 현수막, 지역내 구직단체 협약 등)

❍ 2024.(연중) : 인력중개 및 사후관리, 정산자료 및 보고서 작성 등

❍ 2024. 12. : 사업완료 및 평가

구 분	공약사업
담당부서	농축산과(친환경농업담당)
추진진도(%)	75%

56

친환경농업 인프라 확충 및 지원

○ 사람과 자연이 공존하는 친환경농업 인프라 확충으로 안전한 먹거리    생산지원 및 농가소득 향상

□ 사업개요

❍ 위    치: 산청군 관내 일원

❍ 사업기간: 2022 ~ 2026년

❍ 사 업 비: 금3,587백만원(군비)

❍ 사업내용: 친환경인증수수료 지원사업, 친환경인증농가 장려금 지급,

친환경인증농가 유박지원사업

□ 추진사항

❍ 2023년 친환경인증수수료 지원사업 : 590농가, 160백만원

❍ 2023년 친환경인증농가 장려금 지원사업 : 770ha, 271백만원

❍ 2023년 친환경인증농가 유박지원사업 : 590농가, 274백만원

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 2024 ~ 2026년: 지속가능한 친환경농업 육성사업 추진

구 분	공약사업
담당부서	농축산과(친환경농업담당)
추진진도(%)	65%(정상추진)

57

직불금 확대

○ 쌀 공급에 대한 탄력적 대응을 위해 타작물 재배 직불금 지원으로 쌀값

안정 및 농가소득 안정화를 통한 모두가 행복한 산청구현

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 관내 일원

❍ 총 소요예산 : 금3,140백만원(국비 400, 도비 50, 군비 2,690)

❍ 사업내용 : 논 타작물재배 농지 3,000천원/ha 직불금 지급

❍ 사업기간 : 2022 ~ 2026년

□ 추진사항

❍ 2023. 12월: 2023년 전략작물직불제, 논타작물재배보조금 교부

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 2024. 1. ~ 3월: 사업추진계획 수립 및 대상자 선정

❍ 2024. 7. ~ 9월: 사업이행점검

❍ 2024. 12월: 사업보조금 지급

구 분	공약사업
담당부서	농축산과(축산내수면담당)
추진진도(%)	75%(정상추진)

58

흑돼지 명품화 사업 지속 확대

○ 모돈 갱신 등 개량 지원을 통한 생산성 제고로 흑돼지 기반 확대 및 특색있는 미래 축산 소득원으로 흑돼지 브랜드 활성화로 농가소득 향상

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 오부면, 생초면, 금서면

❍ 사업기간 : 2022 ~ 2026년

❍ 사 업 비 : 금1,704백만원(도비 94, 군비 758, 자부담 852)

❍ 사업내용 : 흑돼지 농가 육성사업(모돈 및 웅돈), 냉방기 구입, 폐사축처리기 지원

□ 추진사항

❍ 2023.  7월 : 폐사축처리기 지원 30,000천원

❍ 2023. 12월 : 흑돼지농가 육성지원사업(모돈64두, 웅돈2두) 지원 46,630천원

□ 문제점 및 대책

❍ 흑돼지 노령돈·저능력돈으로 인한 생산성 저하

❍ 흑돼지 농가 육성사업(모돈교체, 웅돈구입, 우수정액구입 등)지원으로 능력개량 향상(출하두수 증가 및 사육시간 단축)

□ 향후 추진계획

❍ 2024 ~ 2026년: 흑돼지 농가 육성을 위한 사업 추진

구 분	공약사업
담당부서	농축산과(축산내수면담당)
추진진도(%)	85%(정상추진)

59

유기축산 한우단지 확대

○ 산청친환경농업과 축산업이 연계한 자연순환농업의 실현 및 유기한우 관련 산업육성으로 유기한우의 보전 및 지원확대를 통한 축산농가 소득 증대

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 차황면, 오부면 일원

❍ 사업기간 : 2022 ~ 2026년

❍ 사 업 비 : 금3,819백만원(군비 3,539, 자부담 280)

❍ 사업내용 : 유기축산조사료생산지원, 유기농한우 유기사료 차액보전,

유기한우포장재 지원사업, TMR사료 포장재 지원사업 등

□ 추진사항

❍ 2023.  7월 : 유기축산용 조사료 200톤 20백만원 지원

❍ 2023. 11월 : TMR사료 포장재 구입비 242,610매, 54백만원 지원

❍ 2023. 11월 : 유기한우포장재 구입비 유기한우사골곰탕 파우치 등 100백만원 지원

❍ 2023. 12월 : TMR사료 구입비 지원 5,806톤 364백만원 지원

❍ 2023. 12월 : 유기농한우 유기사료 차액보전 206두 165백만원 지원

□ 문제점 및 대책

❍ 사료비 상승과 국내경기침체에 따른 유기한우 생산비 증가 및 유기한우 생산농가 소득 감소

❍ 유기축산사업 지원확대를 통한 유기한우 사육농가 경영안정 도모

□ 향후 추진계획

❍ 2024 ~ 2026년: 유기한우 사육농가 및 사육두수 확대를 위한 사업 추진

구 분	공약사업
담당부서	농축산과(축산내수면담당)
추진진도(%)	80%(정상추진)

60

흑돼지 축제 개최

○ 흑돼지 축제 개최로 산청흑돼지의 부가가치를 높이고 농가소득 창출

□ 사업개요

❍ 위    치 : 농특산물 대제전 행사장 내

❍ 사업기간 : 2024 ~ 2026년

❍ 사 업 비 : 금220백만원(군비 220)

❍ 사업내용 : 산청흑돼지 판매 및 시식회, 산청흑돼지 요리경연대회, 산청흑돼지 홍보 캠페인 등

□ 추진사항

❍ 2023.  7월 : 흑돼지 축제 개최를 위한 업무 협의(농협, 산림녹지과)

❍ 2023. 11월 : 흑돼지 축제 예산 60백만원 편성

□ 문제점 및 대책

❍ 축제로 부가가치 창출을 위한 참여형 체험 프로그램, 다양한 콘텐츠 등 부족

❍ 축제의 경제적 효과 제고를 위해 산청군 농특산물 대제전(축제)과 연계하여 판매 및 시식행사 홍보 추진

□ 향후 추진계획

❍ 2024 ~ 2026년: 산청흑돼지 우수성 홍보 및 소비촉진행사 추진

구 분	공약사업
담당부서	농축산과(가축방역담당)
추진진도(%)	5%(장기추진)

61

함양산청축협 축분퇴비유통센터 이전

○ 가축분뇨 공동자원화시설 이전 신축으로 가축분뇨 자원화 및 안정적

처리를 통한 축산농가의 소득증대 및 주거환경 개선

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 관내 일원

❍ 사업기간 : 2022 ~ 2026년

❍ 총 소요예산 : 금25,200백만원(국비 12,600, 도비 2,520, 군비 2,520, 융자 7,560)

❍ 사 업 량 : 축분퇴비유통센터 신축 1개소

❍ 사업내용 : 300톤/일 규모 가축분뇨 공동자원화(에너지화, 퇴액비화, 정화) 시설 이전

□ 추진사항

❍ 2022. 10월: 가축분뇨 공동자원화시설 지원 공모사업 신청 관련 협의

❍ 2023. 2. 15.: 경상남도 공동자원화시설 담당사무관 및 담당자 사업관련 협의

❍ 2023. 4. 4.: 함양산청축협퇴비유통센터 관계자 업무 협의

❍ 2023. 4. 12.: 경기도 이천 공동자원화시설 견학(경남도, 군, 축협)

- 해당지역은 대단위 축사 설치 지역으로 축분처리를 위하여

공동자원화시설 설치시 지역주민 적극 찬성함

❍ 2023.  4월: 사업대상지 물색

□ 문제점 및 대책

❍ 사업부지 선정 및 주민동의 절차 이행 애로

- 후보 지역 등에 숙원사업 지원 등으로 지역민 동의 추진

□ 향후 추진계획

❍ 2024. 1월: 이전 타당성 검토 용역 착수

구 분	시책사업
담당부서	농축산과(가축방역담당)
추진진도(%)	25%(정상추진)

62

한우 직거래 활성화 지원

○ 고품질 산청한우의 유통활성화 및 합리적인 가격 공급으로 소비기반을

확대하여 한우 농가의 소득증대 기여

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 관내 일원

❍ 사 업 비 : 금620백만원(국비 150, 도비 24, 군비 198, 자담 248)

❍ 사 업 량 : 직거래활성화 지원 1개소, 판매업소 위생시설개선 지원 6개소

❍ 사업내용

- 축산물 직거래활성화 지원

- 축산물 판매업소 위생시설개선 지원

□ 추진사항

❍ 축산물 직거래활성화 지원

- 2023. 1월: 사업(자동파우치 구입) 교부결정

- 2023. 6월: 자동파우치 제품 생산설비 제작 및 납품완료

- 2023. 7월: 자동파우치 제품 생산

❍ 축산물 판매업소 위생시설개선 지원

- 2022. 10월: 축산물 판매업소 시설개보수비 수요 파악

- 2023. 6월: 사업(진공포장기 및 전자저울 구입) 완료 1개소

□ 문제점 및 대책

❍ 축산물 직거래활성화 지원사업 및 축산물 판매업소 위생시설개선 지원 사업대상자 발굴 애로

- 계속적인 사업 홍보로 사업대상자 발굴

□ 향후 추진계획

❍ 2024 ~ 2026년: 사업대상자 발굴 및 사업 지속 추진

농업진흥과

2023년 하반기 군정 주요업무 평가결과

(농업진흥과)

□ 총    평

❍ 미래농업 기후변화에 대비한 과수·특작, 원예생산시설 기반조성, 스마트팜 청년창업 교육운영으로 우리군 농가소득 증대 기여

□ 추진상황

구 분	추진실적(건)						비 고
	계	완료	이행후 계속추진	정상 추진	장기 추진	기타
계	5			4	1
군수공약사업	4			4
주요시책사업	1				1

□ 주요성과(공모사업 등)

❍ 기후변화에 대비한 신소득작물 재배 활성화

❍ 고품질 산청사과 명품화 지원으로 과원 안정 생산 기반시설 확충

❍ 스마트팜 청년창업 교육시설 운영 및 국내외 현장견학으로 농업의 견문 확대

□ 반    성

❍ 기후위기에 대응하여 다양한 사업 발굴 및 농업인 교육 지원 강구

❍ 주요사업 추진으로 열악한 농업환경개선 및 안정적 소득향상 필요

□ 향후 추진계획

❍ 기후변화에 대비한 전략 재배작물 확충 및 지도업무 추진

❍ 고품질 산청사과 명품화 및 고소득 작물 스마트산업, 스마트팜 청년창업 교육 운영을 계속 확대하고 지원 예정

❍ 딸기하우스 물공급 시설과 관련한 경남도, 중앙부처 지속 건의

구 분	공약사업
담당부서	농업진흥과(미래농업담당)
추진진도(%)	30%

63

기후변화에 대비한 전략 재배작물 육성

○ 기후변화에 대비하여 우리 지역에 적합한 재배작물을 도입 육성함으로써      신규 농업인이 안정적으로 농촌에 정착할 수 있도록 유도

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 관내 일원

❍ 사 업 비 : 금2,700백만원(군비 1,350, 자부담 1,350)

❍ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2026. 12월

❍ 사 업 량 : 시설재배단지 3ha 조성

❍ 사업내용 : 신품종 및 아열대 원예작물 시설지원 등

(애플망고, 만감류, 블루베리 등)

□ 추진사항

❍ 기후변화 대비 전략 재배작물 육성 계획 수립          : 2022.  9월

❍ 2023년 기후변화 대응 신소득 작목 육성 및 보급 3농가, 애플망고 1ha : 2023. 12월

❍ 농업기술센터 내 아열대작물 실증시험 기반 조성       : 2023. 12월

❍ 사업대상자 신청 접수                                : 2024.  1월

□ 문제점 및 대책

❍ 시설 과수에 대한 농업인 전문지식 부족 등으로 재배 중 다양한 문제 발생

❍ 아열대작물 재배기술 교육 및 선진지 견학 등 공감적 형성 필요

❍ 전문지도사의 역량향상을 통한 농업인 현장 컨설팅 실시

□ 향후 추진계획

❍ 사업 시행 및 현장 컨설팅 실시                   : 2024. 3. ~ 12월

❍ 사업 완료 및 평가                               : 2024. 12월

구 분	공약사업
담당부서	농업진흥과(과수특작담당)
추진진도(%)	25%

64

고품질 산청사과 명품화 지원

○ 이상기상 대응 고품질 명품사과생산으로 산청사과산업 경쟁력강화

○ 품종 다양화와 중․소과생산을 통한 소비 다변화 대응 및 소득증대

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 관내 사과재배단체 및 농가

❍ 사 업 비 : 금1,600백만원(군비 800, 자부담 800)

❍ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2026. 12월

❍ 사 업 량 : 40개소

❍ 사업내용

- 과원안정생산 기반시설, 방조망 시설, 관수 및 냉해예방시설

- 국내육성품종갱신, 고속방제기, 선별기, 친환경농자재 지원 등

□ 추진사항

❍ 사업완료 10개소, 품목교육 4개 작목반 각 1회 실시 : 2023. 1. ~ 12월

□ 문제점 및 대책

❍ 보조사업에 대한 철저한 교육과 수시점검으로 조속한 사업 마무리

□ 향후 추진계획

❍ 사업추진 및 마무리                              : 2024. 1. ~ 11월

❍ 정산 및 사후관리                                : 2024. 12월

구 분	공약사업
담당부서	농업진흥과(과수트작담당)
추진진도(%)	10%

65

고소득 작물 스마트 4차산업 지원

○ 고소득 작물 자동제어 시설장비 설치로 노동력 절감

○ 작물재배 환경 모니터링 및 생육상황 원격감시로 경쟁력 확보

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 생비량면 일원

❍ 사 업 비 : 금400백만원(국비 80, 도비 36, 군비 84, 자부담 200)

❍ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2026. 12월

❍ 사 업 량 : 1개소

❍ 사업내용

- ICT제어를 위한 통신시스템, 센서 설치 및 CCTV 설치

- 온․습도 정보 취합 및 생육환경 조성을 위한 제어시스템 설치

□ 추진사항

❍ 보조사업자 신청 공모 및 접수                    : 2023. 4월

□ 문제점 및 대책

❍ 단동 하우스는 센서 등 스마트팜 설치비 과다로 효율성 저하가 예상되므로 사업 진행시 유의사항 안내

❍ 스마트팜 홍보, 수요조사 및 대상자 선정 후 단년도 사업 마무리

□ 향후 추진계획

❍ 보조사업자 신청 공모 및 접수                    : 2024. 3. ~ 4월

구 분	공약사업
담당부서	농업진흥과(농업육성담당)
추진진도(%)	30%

66

스마트팜 청년창업 교육 시설 운영

○ 스마트팜 전문교육, 국내외 현장교육 추진, 정예 청년 농업인력 육성

○ 스마트팜 및 정밀농업 신속 보급으로 안정된 소득창출 향상

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 농업기술센터 일원 및 현지

- 미래생명관, 시설하우스 실습교육장(3,420㎡), 스마트팜 관련 교육장

❍ 사 업 비 : 금200백만원(군비 200)

❍ 사업기간 : 2023. 5. ~ 2026. 12월, 매년 반복시행

❍ 사업내용 : 스마트팜 청년창업 교육 운영(제1기~제4기)

- 대    상 : 시설원예작물등 농업인 13명

- 기    간 : 2023. 6. ~ 2026. 11.(매년 5개월)

- 회    수 : 15회, 120시간(년간)

- 주요내용 : 기초(전기전자), 심화(작물 양수분관리, 복합환경제어),

실습(부품조립), 연수(국내외현장견학 등)

□ 추진사항

❍ 제1기 개강식 및 오리엔테이션                        : 2023.  6월

❍ 이론․현장․실습 교육시행 및 해외연수                  : 2022. 10월

❍ 교육완료 및 평가                                    : 2023. 10월

□ 문제점 및 대책

❍ 국외 선진지 현장교육 추진을 위한 국외연수비 확보 필요

- 10명, 40,000천원(매년)

□ 향후 추진계획

❍ 제2기 교육생 모집 및 교육시행                     : 2024. 5월

❍ 사업추진 및 졸업생 대상 연구회운영                : 2024. ~ 2026년

구 분	시책사업
담당부서	농업진흥과(미래농업담당)
추진진도(%)	10%

67

딸기하우스 물 공급 시설 설치

○ 지하수 고갈에 따라 딸기하우스 재배농업인이 양질의 수량을 확보할 수 있도록 공급원을 확보하고 농가에 보급

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 신등면, 신안면 딸기 재배지

❍ 사 업 비 : 금14,000백만원(국비 14,000)

❍ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2026. 12월

❍ 사업내용 : 손항저수지 용수 공급관 설치로 시설딸기하우스에 물공급

□ 추진사항

❍ 농가의견 수렴                                  : 2022. 9월

❍ 사업추진 관련 자문                             : 2022. 11. ~ 12월

❍ 도지사 사업 건의(건설과 농업기반담당)           : 2023. 8월

□ 문제점 및 대책

❍ 수막 사용에 의한 물 부족 현상을 해결하기 위해 저수지용수를 공급하고자 하는 계획이었으나, 경남도 건의 결과 사업 추진 애로 판단(적합사업 없음)

❍ 시범사업 1개소(도리저수지) 추진 결과 갈수기 저수위(80% 이하) 도달로 용수 공급 불가능한 상황 발생

❍ 다겹보온커튼 등 보온시설 활용을 통한 수막활용 비중을 줄여 재배용수 확보 노력

❍ 국비사업 및 자체사업으로 다겹보온커튼 설치 지원 확대

□ 향후 추진계획

❍ 사업추진 불가로 다겹보온커튼 및 정수시설 추가지원 : 2023. ~ 2026년

❍ 경남도 및 중앙부처 사업신설 지속 건의 및 농촌용수개발사업 예산확보 추진(건설과 농업기반담당)

농 식 품 유 통 과

2023년 하반기 군정 주요업무 평가결과

(농식품유통과)

□ 총    평

❍ 생산기반시설 현대화 및 유통가공시설 확충으로 지역경제 활성화 및 농가소득 증대

❍ 적극적이고 선제적인 마케팅으로 판로다양화 및 유통경쟁력 강화

□ 추진상황

구 분	추진실적(건)						비 고
	계	완료	이행후 계속추진	정상 추진	장기 추진	기타
계	4			2	2
군수공약사업	1			1
주요시책사업	3			1	2

□ 주요성과(공모사업 등)

❍ 소상공인 구독경제 지원사업 공모사업 선정으로 지역 농가의 구독상품(정기배송) 개발 및 판매를 통한 안정적인 판로 확보와 수익 창출 지원

❍ 산엔청쇼핑몰 및 신유통채널 구축 운영과 고속도로 상·하행선 휴게소 로컬푸드행복장터, 산엔청 마실장터 운영으로 판로의 다양화 및 유통경쟁력 강화

❍ 온라인 이벤트행사, 쇼핑몰 타임세일, 리뷰이벤트, 단골 고객확보 방안을 마련하여 유통판로 위기상황 극복

❍ 농기계임대사업소의 적합한 인력운영과 시설장비 확충을 통한 농기계 정비대기시간을 줄여 농업인 농작업 편의제공 및 농촌 일손부족 해소

□ 향후 추진계획

❍ 생산기반시설 및 유통시설의 지속적인 지원을 통한 유통기반 강화

❍ 산엔청쇼핑몰의 제품 확보 등으로 지속적인 판매량 증대

❍ 로컬푸드 행복장터, 산엔청 마실장터 운영 활성화

❍ 농기계임대사업소의 효율적이고 체계적인 운영으로 농촌 일손부족 해소 기여

구 분	공약사업
담당부서	농식품유통과(먹거리담당)
추진진도(%)	40%

68

산청군 먹거리통합지원센터 건립

❍ 지역 선순환 먹거리 구축·확대를 위한 먹거리통합지원센터 건립

❍ 학교급식 등 지역 먹거리 소비 촉진 및 농가 소득 증대

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 산청읍 병정리 326-6

❍ 사 업 비 : 3,000백만원(도비 1,950, 군비 1,050)

- 2023년 지방전환사업(농촌자원복합산업화지원) 확정

❍ 사 업 량 : 지상1층 825㎡

❍ 사업내용 : 먹거리통합지원센터 건립 1식

- 선별포장장, 저온저장고, 물류피킹장, 전처리장 등

□ 추진사항

❍ 2021.  2. ~  9.  : 산청군 푸드플랜 수립 연구용역 실시

❍ 2022.  3.       : 산청군 푸드플랜 및 먹거리통합지원센터 건립 계획 수립

❍ 2022.  6.       : 먹거리통합지원센터 공유재산 관리계획 수립

❍ 2023.  2.       : 기본계획 수립 및 타당성 조사 용역

❍ 2023.  6.       : 건축기획 용역

❍ 2023. 10.       : 기본 및 실시설계용역

❍ 2023. 12.       : 신축공사 시행(동절기 중단)

□ 문제점 및 대책

❍ 일반농가의 학교급식 식재료 납품 기준 충족 애로(규격, 포장 등)로 인한 참여도 저조 예상

❍ 생산자 조직 단계부터 지속적인 교육, 견학 등 실시

□ 향후 추진계획

❍ 2023. 12. ~ 2024. 7. : 먹거리통합지원센터 건립

❍ 2024.  9. ~ 12.      : 먹거리통합지원센터 시범운영(5개소)

❍ 2025.  3. ~          : 먹거리통합지원센터 정상운영

구 분	시책사업
담당부서	농식품유통과(유통수출담당)
추진진도(%)	10%

69

산청읍 정미소(도정공장) 설치

❍ 산청읍내 정미소 부재로 주민의 생활에 불편이 많으므로 정미소 설치 지원으로 주민 편의 제공 및 쌀산업 경쟁력 제고

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2024년

❍ 위    치 : 산청읍 일원

❍ 사 업 량 : 정미소 설치 1식

❍ 사업내용 : 공장건물 신축 1동(330㎡), 정미기계 1식, 등

❍ 소요예산 : 1,873백만원(군비) 정도

□ 그간 추진사항

❍ 2022. 6. 28 : 사업추진 1차 간담회 개최

❍ 2022. 7. 21 : 추진계획 수립

❍ 2022. 8.  1 : 사업추진 2차 간담회 개최

❍ 2023. 9. 11 : 산청읍이장단협의회장 협의

도정사업은 운영수익 적자가 예상되는 사양사업인 것은 공감하고

있으며, 다른 분야로 산청읍 주민들에세 도움이 되는 사업 발굴

□ 문제점 및 대책

1. 사업비 문제점 및 대책

❍ 정미소 신축사업은 국·도비 지원사업이 없어 전액 군비사업으로 추진

비수익사업으로 군비 지원 확대 필요(기존보조금·자부담 비율 50:50)

❍ 도정사업은 사양산업으로 신설 시 적자운영이 예상

관내 도정공장 대부분 운영 수익 적자(운영 15개소, 휴폐업 12개소)

❍ 공신력 있는 기관에서 운영 필요(산청군농협 등)

❍ 도정공장 신축 시 기존 도정공장 반발예상

□ 향후 추진계획

❍정미소 설치는 중단하고, 기존 운영중인 정미소 활용(산청읍 및 인근지역)

기존 운영중인 정미소 기계설비 보완 등 지원(공장주 원할 시)

구 분	시책사업
담당부서	농식품유통과(농촌자원담당)
추진진도(%)	10%

70

농업 융복합 6차산업 지원 확대

❍ 발전 잠재력과 시장 경쟁력을 갖춘 소규모 농산물 가공산업을 발굴 지원하여 농산물 소비력 강화로 농업 융복합 기반 조성

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 관내

❍ 사 업 비 : 100백만원(군비 50, 자부담 50)

❍ 사 업 량 : 2개소

❍ 사업내용 : 농산물 가공 관련 기계장비, 기자재, 체험프로그램 개발 등

□ 추진사항

❍ 2023. 1~9월 : 사업대상자 물색 및 홍보

❍ 2023. 10월 : 사업 신청 공고

❍ 2023. 11월 : 사업 신청 재공고

❍ 2023. 12월 : 사업신청 대상자 현지조사 실시

□ 문제점 및 대책

❍ 사업 적합 대상자 확보 어려움

❍ 사업지침 수정 후 2024년도 재공고 실시

□ 향후 추진계획

❍ 2024. 1월 ~  2월 : 사업 신청 공고 및 대상자 선정

❍ 2024. 3월 ~ 10월 : 사업 시행

❍ 2024. 11월 : 사업 평가

구 분	시책사업
담당부서	농식품유통과(유통수출담당)
추진진도(%)	10%

71

택배 집하주차장 등 판로 시설 구축

❍ 택배 집하장 등 판로 시설을 구축하여 유통 효율 향상

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 매년 12월 ~ 익년 1월중

❍ 위    치 : 산청군 시천면 일원

❍ 사업내용 : 임시 택배 집하 주차장 설치

□ 그 간 추진사항

❍ 택배 집중 출하기 혼잡 방지를 위해 「예비 사전접수」홍보

❍ 우체국 내 접수 창고 증설(2개소→4개소, 인부 2명 추가 사역)

□ 문제점 및 대책

❍ 택배집하주차장 설치는 장기적으로 시천 우체국 주변 주차장 확보 필요

❍ 우정사업본부와 협의 (중장기 계획으로 추진)

산청우체국 협의 시 증축이나 신축 계획없다는 답변 받음

❍ 택배집중출하시기에 택배 이용 농가 불편

시천면 택배업체 분산 배송으로 불편 해소

기존 택배사 : 3개소(우체국, CJ, 로젠택배)

신설 택배사 : 2022년 11월 1개소 추가(롯데택배), 2023년 12월 1개소 추가(한진택배)

□ 향후 추진

❍택배 집하주차장 미추진(우정사업본부 과제), 곶감이나 고로쇠등 택배집중 출하시기에      곶감경매장이나 면사무소 앞 주차장에 현장 접수 등 추진으로 불편 해소

곶감축제 및 고로쇠 축제 시 택배 배송에 따른 불편사항 없었음(2023년, 2024년)

농가자체 택배발송(소비자 현장구매 후 농가 택배발송)으로  소비자 불편사항 없음